문서번호	물재생계획과-15906
결재일자	2019.11.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
★주무관	하수악취저감팀장	물재생계획과장
최용진	한상각	11/27 하상문

악취저감사업 악취조사 용역 설계변경 보고

2019. 11.

물순환안전국

(물재생계획과)

악취저감사업 악취조사 용역 설계변경 보고

하수도시설물 악취저감사업 악취조사지역 공사 미완료에 따라 용역기간을 연장하는 설계변경을 실시하고자 함

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2019년 하수도시설물 악취저감사업 악취조사 용역

○ 용역기간 : 2019. 05. 16 ~ 11. 30

○ 용 역 비 : 69,887,000원

○ 용 역 사 : ㈜한국하수도기술

○ 주요과업내용

- 도심명소, 도시재생지역 악취 사전조사 및 대상 선정

- 악취저감사업 추진 전·후 악취조사 및 평가

□ 추진경위

○ ‘19.4월 : 하수도시설물 악취저감사업 악취조사 용역계획 방침

○ ‘19.5월 ~ : 계약완료 및 사업추진

□ 설계변경내용

○ 변경내역 : 사업기간 연장(계약금액 변동없음)

구분	당초	변경	비고
용역기간	2019.11.30까지	2019.12.30까지	30일 연장

○ 변경사유 : 자치구별 시행중인 악취저감사업 미완료에 따른 조사기간 연장

□ 조치계획 : 계약변경

○ 용역 계약변경 의뢰(→재무과), 용역사인 ㈜한국하수도기술과 변경계약 체결

붙 임 : 사업계획 방침서, 계약변경 합의각서 각 1부.  끝.