투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	용역 준공기한 연기 의뢰(신상도 지하차도 확장공사 건설폐기물 처리용역)

우리 부에서 시행 중인「신상도 지하차도 확장공사 건설폐기물 처리용역」에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 용 역 명: 신상도 지하차도 확장공사 건설폐기물 처리용역

2. 계약금액: 353,987,000원(1차: 100,000,000원)

3. 용역기간: 2019.4.1. ~ 2020.12.31.(1차: 2019.4.1. ~ 2019.12.31.)

4. 계 약 자: 삼양이앤디(주) 외 1개사(대표: 최훈성)

5. 준공기한 연기 의뢰내용(※ 계약금액 변경 없음)

구 분	당 초	변 경	비 고
총차	2019.4.1. ~ 2020.12.31.	2019.4.1.~ 2020.12.31.	변경 없음
1차	2019.4.1. ~ 2019.12.31.	2019.4.1. ~ 2020.5.31.	증 152일

6. 예산과목: 안전총괄본부 도로계획과, 도로 건설, 간선도로망 확충(도시개발특별회계), 신상도 지하차도 확장, 시설비 및 부대비, 시설비

7. 연기사유: 공사 착수 지연에 따라 폐기물 처리용역 1차분 계약물량 처리 이전에 준공기한이 도래하였으며, 공사 착수 이후 폐기물이 순차적으로 발생함에 따라 원활한 공사 추진을 위해 준공기한 연기 필요

붙임  1. 준공기한 연기 검토보고서 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	방재시설부장
주무관	이시연		방재시설과장	진재섭		방재시설부장	11/27 이임섭
협조자	주무관	김상용
시행	방재시설부-17722	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)프리미어플레이스빌딩 14층	/
전화	02-3708-8764	/전송	02-3708-8756	/	siyeon0907@seoul.go.kr	/	부분공개(5)