투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(도로계획과장)
(경유)
제목	설계용역 준공기한 연기 요청(잠실천호대교 남단IC 연결체계 기본 및 실시설계)

1. 토목부-21751(2019.11.27.)호와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행중인 『잠실·천호대교 남단IC 연결체계 개선 기본 및 실시설계』관련 아래와 같이 준공기한 연기를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 잠실·천호대교 남단IC 연결체계 개선 기본 및 실시설계

나. 용역개요 : 잠실대교 남단IC [연장 3.66km, 지하차도 300m, 교량 33m]

천호대교 남단IC [연장 2.95km, 지하차도 194m]

다. 용 역 사 : ㈜제일엔지니어링, ㈜동해종합기술공사, ㈜수성엔지니어링

라. 용역기간 : 당초  '19.3.5.~'19.11.30. ⇒  변경 '19.3.5.~'20.1.31.

마. 연장사유 : 지하안전영향평가 보완요청 사항 결과반영을 위한 과업기간 연장

붙임 : 1. 준공기한 연기 검토보고 1부.

2. 설계감리 검토보고서 1부.

3. 관련공문 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	조재근		토목설계과장	김동현		토목부장	11/27 代박일연
협조자
시행	토목부-21777	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2589	/전송	02-3708-2599	/		/	부분공개(5)