투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	용역 준공기한 연기 의뢰(신상도 지하차도 확장공사 건설사업관리용역)

우리 부에서 시행 중인「신상도 지하차도 확장공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역」에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 용 역 명: 신상도 지하차도 확장공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역

2. 계약금액: 951,000,000원(1차: 250,000,000원)

3. 용역기간: 2019.3.4. ~ 2021.2.3.(1차: 2019.3.4. ~ 2020.1.3.)

4. 계 약 자: 극동엔지니어링(주) 외 2개사(대표: 이철준)

5. 준공기한 연기 의뢰내용(※ 계약금액 변경 없음)

구 분		당 초	변 경	비 고
용역 기간	총차	2019.3.4. ~ 2021.2.3.	2019.3.4. ~ 2021.10.27.	증 266일
	1차	2019.3.4. ~ 2020.1.3.	2019.3.4. ~ 2020.6.13.	증 162일

6. 예산과목: 안전총괄본부 도로계획과, 도로 건설, 간선도로망 확충(도시개발특별회계), 신상도 지하차도 확장, 시설비 및 부대비, 감리비

7. 연기사유

가. 총차: 용역 착수 지연에 따른 용역 중지기간(266일) 반영

나. 1 차: 용역 착수 지연으로 착수 직후 준공기한이 도래함에 따라 준공기한 연기 필요

붙임  1. 준공기한 연기 검토보고서 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	방재시설부장
주무관	이시연		방재시설과장	진재섭		방재시설부장	11/27 이임섭
협조자	주무관	김상용
시행	방재시설부-17723	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)프리미어플레이스빌딩 14층	/
전화	02-3708-8764	/전송	02-3708-8756	/	siyeon0907@seoul.go.kr	/	부분공개(5)