문서번호	토목부-21719
결재일자	2019.11.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
권해엽		代황윤기	11/27 代박일연
협조
	주무관		황윤기

설계변경(전체5회, 6차5회) 검토 보고

- 천호대로(광나루역)확장공사 건설폐기물 처리용역 -

2019.11.

도시기반시설본부

(토목부)

설계변경(전체 5회, 6차 5회) 검토 보고

- 천호대로(광나루역) 확장공사 건설폐기물 처리용역 -

천호대로 (광나루역) 확장공사가 완료됨에 따라 건설폐기물처리 물량에 대하여 정산하고자 변경보고 드림.

※ 관련근거 : 수성 제2019-0000호(2019.11.27.)

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 천호대로(광나루역) 확장공사 건설폐기물 처리용역

○ 용역규모 : 폐콘크리트 18,809톤, 폐아스콘 21,132톤,

혼합폐기물 1,408톤

○ 용역기간

- 전  체 : 2010.12.31. ~ 2019.11.30.

- 6   차 : 2016.01.14. ~ 2019.11.30.

○ 용 역 사 : 정일산업(주)

□ 설계변경 및 주요내용

○ 전체분(6회 변경)                                    (금액 : 천원)

구 분		당 초	변 경	증 . 감(△)	비고
전 체 (6회)	도 급 액	688,706	614,526	△74,180
	용역기간	2010.12.31. ~ 2019.11.30.	2010.12.31. ~ 2019.11.30.	-

○ 6차분(5회 변경)                                    (금액 : 천원)

구 분		당 초	변 경	증 . 감(△)	비고
6차 5회	도 급 액	220,290	146,110	△74,180
	용역기간	2016.01.14. ~ 2019.11.30.	2016.01.14. ~ 2019.11.30.	-

○ 설계변경 사유

- 천호대로 (광나루역) 확장공사가 완료됨에 따라 실제 반출된 건설폐기물 물량을 정산하고자 함.

○ 물량 증·감(△) 현황

공 종 명			전 체 (6회)			6 차 (5회)
			당초	변경	증 ∙ (-)감	당초	변경	증 ∙ (-)감
1, 폐기물 운반
	폐콘크리트		18,809	19,366	557	1,187	3,132	557
	폐아스콘		21,132	15,497	- 5,635	3,881	9,773	- 5,635
	혼합폐기물		1,408	1,408	-	546	546	-
2. 폐기물처리
	폐콘크리트		18,809	19,366	557	1,187	3,132	557
	폐아스콘		21,132	15,497	- 5,635	3,881	9,773	- 5,635
	혼합폐기물		1,408	1,408	-	546	546	-
용역비		공급가액	626,096,364	558,660,000	- 67,436,364	200,263,635	132,827,274	- 67,436,364
		VAT	62,609,636	55,866,000	- 6,743,636	20,026,365	13,282,726	- 6,743,636
		도급액	688,706,000	614,526,000	- 74,180,000	220,290,000	146,110,000	- 74,180,000

○ 용역비 변경 현황(전체 6회)                          (금액 : 원)

구 분			단위	수량			공사비(원)
				당초	변경	증 ∙ (-)감	당초	변경	증 ∙(--)감
1. 폐기물처리비
	폐콘크리트		ton	18,809	19,366	557	77,869,260	80,177,723	2,308,463
	폐아스콘		ton	21,132	15,497	5,635	84,528,000	61,988,920	-22,539,080
	혼합폐기물		ton	1,408	1,408	-	6,407,310	6,407,310	-
2. 폐기물 운반비
	폐콘크리트		ton	18,809	19,366	557	210,848,890	217,099,585	6,250,695
	폐아스콘		ton	21,132	15,497	5,635	200,415,888	146,975,729	-53,440,159
	혼합폐기물		ton	1,408	1,408	-	46,034,058	46,034,058	-
3	단수정리						7,042	-23,325	16,283
용역비		공급가액					626,096,364	558,660,000	-67,436,364
		VAT					62,609,636	55,866,000	-6,743,636
		도급액					688,706,000	614,526,000	-74,180,000

○ 용역비 변경 현황(6차 5회)                             (금액 : 원)

구 분			단위	수량			공사비(원)
				당초	변경	증 ∙ (-)감	당초	변경	증 ∙(--)감
1. 폐기물처리비
	폐콘크리트		ton	3,132	3,689	557	12,967,846	15,276,310	2,308,463
	폐아스콘		ton	9,773	4,138	5,635	30,093,000	16,553,920	-22,539,080
	혼합폐기물		ton	546	546	-	2,486,885	2,486,885	-
2. 폐기물 운반비
	폐콘크리트		ton	18,809	19,366	557	35,113,420	41,364,115	6,250,695
	폐아스콘		ton	21,132	15,497	5,635	92,689,503	39,249,344	-53,440,159
	혼합폐기물		ton	1,408	1,408	-	17,867,308	17,867,308	-
3	단수정리						45,672	29,392	-16,280
공사비		공급가액					200,263,635	132,827,274	-67,436,361
		VAT					20,026,365	13,282,726	-6,743,639
		도급액					220,290,000	146,110,000	-74,180,000

□ 감리단 검토의견

○ 천호대로(광나루역) 확장공사가 완료되어 최종 건설폐기물 수량을 확인하여 이를 정산하여 변경함이 적정하다고 사료됨.

□ 조치의견

○ 감리단 검토의견이 타당하여 건설폐기물 처리용역에 대하여 상기 검토내용와 같이 설계(정산) 변경하고자 함.

붙임  감리단 검토의견서 등 관련 자료 각 1부.