문서번호	방재시설부-17655
결재일자	2019.11.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
이시연		진재섭	11/27 이임섭
협 조
	주무관			김상용

「신상도 지하차도 확장공사」

설계변경(6차 1회) 및 준공기한 연기 검토보고

2019.11.

도시기반시설본부

(방재시설부)

「신상도 지하차도 확장공사」

설계변경(6차 1회) 및 준공기한 연기 검토보고

「신상도 지하차도 확장공사」의 설계변경(6차1회) 및 준공기한 연기에 대하여 검토 보고드림. ※ 관련공문: 신상도감 2019-06(2019.11.26.)

Ⅰ		공사 개요

❍ 위    치: 동작구 상도동 159-21~207-5

❍ 규    모: 도로 확장 2차로 → 4～6차로, 연장 324m

(지하차도 확장 2차로 → 4차로, 연장 230m)

❍ 공사기간: ‘07.12.31.~‘20.12.31.(6차 ‘18.12.15.~‘19.12.31.)

❍ 도 급 비: 11,964,876,000원(6차 2,550,000,000원)

❍ 도 급 사: (유)한백종합건설 외 1개사

❍ 사업관리: 극동엔지니어링(주) 외 2개사

Ⅱ		추진 경위

❍ ‘07.12.31.: 공사 계약 및 착공

❍ ‘17. 1.~  : 공사 중지 및 시공사 현장 철수(대광·청학빌라 보상 추진)

❍ ‘17. 2. 24.	: 보상업무 이행 요청(도로계획과 → 동작구)

❍ ‘17. 5. 8.	: 손실보상계획 열람공고(동작구공고 제2017-467호)

❍ ‘18. 8. 9. : 중토위 수용재결위원회 개최(수용개시일 : ‘18.10.4.)

❍ ‘18.10. 4.	: 수용재결 보상금 공탁 완료

❍ ‘18.12.12. : 6차 공사 계약(‘18.12.13.~ : 공사 중지)

❍ ‘19.11.현재: 보완설계 및 지장가옥 주민 이주 독려 중

※ 총 10세대 중 9세대 이주 완료(대광빌라 1세대 미이주)

Ⅲ		보고 내용

▢ 설계변경(6차1회)

❍ 변경사유: ‘19년 예산에 맞추어 총차 물량 내 6차 공사 물량 조정

❍ 변경내용

구 분	당 초	변 경	증·감
총차	11,964,876,000원	11,964,876,000원	변경 없음
6차	2,550,000,000원	2,452,990,000원	감 97,010,000원

❍ 도급비 변경현황

(단위 : 백만원)

구 분	총 차			6 차			비 고
	당 초	변 경	증·감	당 초	변 경	증·감
1. 토 공	1,484	1,484	-	647	647	-
2. 배 수 공	36	36	-	27	27	-
3. 지하차도공	1,625	1,625	-	-	-	-
4. 옹 벽 공	254	254	-	27	27	-
5. 가시설공	2,561	2,561	-	745	745	-
6. 지반보강공	326	326	-	84	84	-
7. 포 장 공	84	84	-	16	16	-
8. 교통안전시설공	247	247	-	-	-	-
9. 부 대 공	458	458	-	126	126	-
10. 조경공사비	76	76	-	8	8	-
11. 사급자재비	1,814	1,814	-	302	227	감 75
12. 지장물이설공	52	52	-	-	-	-
13. 추가공사	231	231	-	-	-	-
직접공사비	9,248	9,248	-	1,982	1,907	감 75
제 경 비	1,511	1,511	-	336	323	감 13
제경비 제외공종	118	118	-	-	-	-
공급가액	10,877	10,877	-	2,318	2,230	감 88
부가가치세	1,088	1,088	-	232	223	감 9
도 급 액	11,965	11,965	-	2,550	2,453	감 97

▢ 준공기한 연기

❍ 연기사유: 6차 공사 중지로 공사 재개(착수) 직후 준공기한 도래

- 관련근거: 방재시설부-15970(2018.12.13.): 공사 중지 알림

방재시설부-16136(2019.10.31.): 공사 재개 알림

※ 공사 중지기간 : 2018.12.15.~2019.12.2.(353일)

❍ 연기내용

구 분	당 초	변 경	증·감
총차	2007.12.31.~ 2020.12.31.	2007.12.31.~ 2020.12.31.	변경 없음
6차	2018.12.15.~ 2019.12.31.	2018.12.15.~ 2020.6.30.	증 182일

※ 2020년 예산으로 7,620백만원을 요구하였으나, 3,810백만원(50%) 배정 예정으로 추후 전체 공사기간 조정이 필요함

Ⅳ		책임건설사업관리기술자 의견

❍ 예산의 효율적 집행을 위하여 당해년도 예산에 맞추어 총차 물량 내에서 6차 물량을 조정하여 설계변경함이 타당하다고 판단되며,

❍  지장가옥 주민 이주 지연에 의한 도로 부지 미확보로 6차 공사 착수가 지연되어 '19.12월 공사 착수 직후 준공기한이 도래함에 따라 준공기한을 연장함이 타당하다고 사료됨

Ⅴ		보고자 의견 및 조치계획

❍ 책임건설사업관리기술자의 검토의견이 적정하다고 판단되는 바, 설계변경 및 준공기한 연기에 대하여 승인 조치하고 계약부서에 변경계약 의뢰하고자 함

붙임  건설사업관리단 검토의견서 1부.  끝.