문서번호	방재시설부-17656
결재일자	2019.11.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
이시연		진재섭	11/27 이임섭
협 조
	주무관			김상용

「신상도 지하차도 확장공사 건설폐기물 처리용역(1차)」

준공기한 연기 검토 보고

2019.11.

도시기반시설본부

(방재시설부)

「신상도 지하차도 확장공사 건설폐기물 처리용역(1차)」

준공기한 연기 검토 보고

「신상도 지하차도 확장공사 건설폐기물 처리용역」의 준공기한 연기에 대해 검토 보고 드림. ※ 관련공문: 신상도감 2019-07(2019.11.26.)

Ⅰ		용역 개요

❍ 용 역 명: 신상도 지하차도 확장공사 건설폐기물 처리용역

❍ 용역기간: ‘19.4.1.~‘20.12.31.(1차 ‘19.4.1.~‘19.12.31.)

❍ 용 역 비: 353,987,000원(1차 100,000,000원)

❍ 용 역 사: ㈜삼양이앤디 외 1개사

Ⅱ		보고 내용

❍ 준공기한 연기 사유

- 신상도 지하차도 확장공사(6차) 착수가 지연됨에 따라 건설폐기물 처리용역(1차)의 계약물량 처리 이전에 준공기한 도래

❍ 준공기한 연기내역

구 분	당 초	변 경	증·감
총차	2019.4.1.~ 2020.12.31.	2019.4.1.~ 2020.12.31.	변경 없음
1차	2019.4.1.~ 2019.12.31.	2019.4.1.~ 2020.5.31.	증 152일

※ 계약금액 변경 없음

Ⅲ		책임건설사업관리기술자 의견

❍  신상도 지하차도 확장공사(6차)의 착수가 지연됨에 따라 건설폐기물 처리용역 1차분 계약물량을 처리하기 이전에 준공기한이 도래한 실정이며,

❍ '19.12월 공사 착수 이후 건설폐기물이 순차적으로 발생할 예정이므로 원활한 공사추진을 위하여 건설폐기물 처리용역(1차)의 준공기한을 연기함이 타당하다고 사료됨

Ⅳ		보고자 의견 및 조치계획

❍ 책임건설사업관리기술자의 검토의견이 적정하다고 판단되므로 준공기한 연기에 대하여 승인 조치하고, 계약부서에 변경계약 의뢰하고자 함

붙임  건설사업관리단 검토의견서 1부.  끝.