투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	평화의공원 위험수목정비공사 설계변경 시행

1. 공원운영과-16358(2019. 11. 27.)호와 관련입니다.

2. 평화의공원 위험수목정비공사 관련 현장여건에 따른 물량변경 발생 사항에 대해 아래와 같이 설계 변경하여 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명: 평화의공원 위험수목정비공사

나. 위    치: 평화의공원 현장근로자 대기실 주변

다. 공사기간: ’19. 11. 12. ~ 12. 01.

라. 공사내용: 수목전정 및 제거

마. 소요예산                                                         (단위:원)

구 분		당 초	변 경	증 감
총 공 사 비		14,250,000	13,904,000	감)346,000
도급비	공 급 가 액	12,954,546	12,640,000	감)314,546
	부가가치세	1,295,454	1,264,000	감)31,454
	계	14,250,000	13,904,000	감)346,000

바. 계 약 자: 산천종합조경(주) 대표 이은아

서울 강동구 성내로8길 9-17(T: 02-482-7811)

사. 변경사유: 현장여건에 따른 물량 변경

아. 예산과목: 서부공원녹지사업소 공원운영과, 공원녹지정책개발 및 만족도개선,

공원유지관리 및 이용활성화, 시공원유지관리 및 보수정비(도시개발특별회계), 시설비 및 부대비, 시설비(예산편성부서:푸른도시국공원녹지정책과)

붙임  1. 설계변경보고서 1부.

2. 변경설계서 1부.  끝.

주무관	김은희		녹지조경팀장	고봉채		공원운영과장	배효성		서부공원녹지사업소장	11/28 남길순
협조자	재무팀장	代김호영
시행	공원운영과-16372	(		)	접수		(		)
우	03901	서울특별시 마포구 월드컵로 243-60	/	http://worldcuppark.seoul.go.kr/
전화	02-300-5544	/전송	02-300-5527	/	eun2@seoul.go.kr	/	대시민공개