문서번호	공원운영과-16391
결재일자	2019.11.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	녹지조경팀장	공원운영과장	서부공원녹지사업소장
김은희	고봉채	代정언룡	11/28 남길순
협 조

월드컵공원장미원조성사업

설 계 변 경 검 토 보 고

2019.   11.

서부공원녹지사업소

(공원운영과)

월드컵공원 장미원조성사업

설 계 변 경 검 토 보 고

「월드컵공원 장미원조성사업」추진 관련 현장 여건에 따른 설계 변경 사항이 발생되어 검토 내용을 보고 드림

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 월드컵공원 장미원 조성사업

○ 위    치 : 평화의공원

○ 기    간 : ’19. 08. 13. ~ 11. 30.

○ 내    용 : 식재기반조성, 관수시설 설치 및 장미 등 식재

○ 계약금액 : 금249,017,870원

○ 계 약 자 : (주)충림종합기술 대표 박복조

□ 설계변경 개요

○ 변경사유 및 내용

구 분	변 경 내 용	사 유
철거공	- 판석포장철거(T30)24㎡→17.5㎡ - 경계석철거(300×300×900)8m→0m - 폐기물상차 및 운반(폐기물)4.473㎥→2.699㎥	- 현장여건에 따른 물량변경
식재공	- 회양목(H0.4×W0.6)3,100주→0주 - 회양목(H0.3×W0.3)0주→5,510주	- 회양목(H0.4×W0.6) 수급 어려움 반영
	- 장미(로즈나무 5치)950주→1,665주 - 장미(위스베츠골드 5치)840주→1,466주 - 장미(크리스트얼 5치)550주→800주	장미원 조성취지에 부합하도록 별도식재지 및 잔디 식재지 일부지역에 장미 식재물량 증 반영
	- 잔디식재(0.4×0.6)293.76㎡→396.61㎡	우드칩포장 감소 면적 및 설계면적과 현장 상이로 증가 면적분 반영

구 분	변 경 내 용	사 유
식재공	- 우드칩포장(T100)542.85㎡→519.35㎡	- 경관고려 경계엣지 주변 우드칩 포장 감 변경 및 장미 신규식재지역 반영
포장공	- 화강석경계석(직선,300×300×1000)20m→12m - 화강석판석포장B(300×300×T30)24㎡→17.5㎡	- 현장여건에 따른 물량변경
우배수공	- 유공관간선(D200,이중벽유공관)151.2m→142.7m	- 현장여건에 따른 물량변경
폐기물	- 폐콘크리트 10.248ton→6.202ton	- 포장공 감 물량 반영

○ 계약금액 변경: 변경없음

(단위:원)

구 분		공 사 비			비고
		당 초	변 경	증 감
총 공 사 비		249,862,400	249,862,400	-
도급비	공 급 가 액	226,379,882	226,379,882	-
	부가가치세	22,637,988	22,637,988	-
	계	249,017,870	249,017,870	-
관 급 비		844,530	844,530	-

□ 향후계획

○ 상기 내용과 같이 현장여건을 반영하여 설계변경하고자 함

붙임  1. 변경설계내역 1부.

2. 제비율검증 확인서 1부.

3. 관목수급 관련문서 1부.