내 가족, 우리 이웃을 지키는 소중한 첫걸음 “주택용 소방시설 설치”
		송파소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	송파소방서 증축건물 옥외 철골계단 발주 계획 보고

1. 관련문서

○ 서울특별시 건축기획과-12477(2019.7.4.)호 『서울특별시 공공건축물 경관 전문위원회 심의결과 외부계단 설치권고』

○ 서울특별시 소방행정과-10382호(2019.7.26.) 『소방관서 시설물 긴급보수예산 재배정 알림』

○ 소방행정과-14695호(2019.10.25.) 『외부계단.3층마감공사등 설계변경(추가발주) 계획』

○ 소방행정과-15813호(2019.11.14.) 『증축공사 외부계단 추가 설계용역 완수검사 결과』

○ 소방행정과-16338호(2019.11.25.)『송파소방서 증축공사 옥외 철골계단 발주계획에 따른 검토요청』

○ KNT.송파-11-27(2019.11.28.)『송파소방서 본서 증축공사 설계변경 검토회신』

2. 송파소방서 본서 증축건물 3층, 4층, 안전피난 및 구조 ․ 진압 훈련 용도로 활용을 위한 외부 철골계단 설치계획에 따라 다음과 같이 시공 발주하고자 합니다.

가. 설계변경(추가발주) 건 : 송파소방서 증축건물 외부 철골계단 설치

나. 시공자 : ㈜ 케이엔티건설(대표 : 권명안)

다. 발주예정 금액 : 57,434,100원

구 분	설계원가	시공사 공사내역가	발주 예정가	비 고
검토부서	이로건축사무소	㈜케이엔티선설	송파소방서 (장비회계팀)	발주 예정가는 시공사 공사내역가에 낙찰률 86.745% 적용
금 액	69,969,000원	66,210,279원	57,434,100원

라. 공사기간 : 2019.12.1.~12.18

마. 추진예산 : 소방관서 시설물 긴급보수 재배정 예산 활용

○  서울특별시 소방행정과-10382호(2019.7.26.)호 예산 재배정(70,000,000원)

바. 조치계획

○ 검토의견 반영하여 외부계단 시공 발주 통보

○ 향후 증축사업 『시공상 설계변경 보고건』을 수합하여 일관 변경계약 체결

붙 임 : 1. 외부 철골계단 설계도면 1부

2. 외부 철골계단 설계원가서 1부

3. 외부 철골계단 시방서 1부

4. 시공사 철골계단 공사 내역 검토서 1부 끝.

장비회계팀장							고석봉			소방행정과장					이재출					소방서장					11/28 김성회
협조자				담당자						최원석
시행			소방행정과-16514									(						)		접수											(						)
우	05737					서울특별시 송파구 오금로51길 56 송파소방서 소방행정과 (마천동)															/			http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화		02-403-4119						/전송			02-489-2119					/	ksb8719@seoul.go.kr												/	대시민공개