문서번호	시설관리과-23557
결재일자	2019.11.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		강서수도사업소장
이한수	정진호	이경희		11/28 배현숙
협 조

『2019년 자동제어설비 유지관리용역(연간단가)』

설계변경 검토보고

2019. 11.

강서수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『2019년 자동제어설비 유지관리용역(연간단가)』

설계변경검토보고

우리사업소에서 시행중인 『2019년 자동제어설비 유지관리용역』의 계약물량 변동 및 원가제비율 정정 등에 따른 설계변경 사유가 발생하여 검토 후 아래와 같이 보고드림.

Ⅰ	용역개요

○ 용 역 명 : 2019년 자동제어설비 유지관리 용역(연간단가)

○ 계 약 자 : *************

○ 계약금액 : ******************************

○ 용역기간 : 2019. 04. 01. ~ 2020. 03. 31.

○ 용역내용 : 배수지·올림터 등 제어설비 유지보수(정기점검 및 제어설비 부품 교체 등)

○ 용역대상 : 22개소

계	제어센터	배수지	아리수올림터	증압장	비 고
22	1	6	5	10

Ⅱ	설계변경검토

○ 설계변경 사유 : 계약물량 변동 및 원가제비율 정정

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증/감	비 고
총 부기금액		43,829,450	43,829,450	0
1차수	‘19년 계약금액	38,648,720	33,560,490	(감)5,088,230
2차수	‘20년 계약금액	5,180,730	10,268,960	(증)5,088,230

※ 계약기간 : 변동없음

○ 물량변동내역

공 종	규 격	단위	당초 수량	변경 수량	물량 증·감	변경사유
통신서지보호기 (SPD)	2Wire 4~20mA	EA	1	2	(증)1	· 계약물량분 공종이 (증) 발생

Ⅲ	향후계획

○ 계약물량 증감 및 제비율 정정 등 변경사항에 대하여 설계변경심의위원회를 개최하여 심의 결과를 반영하여 변경계약하고자 함.

붙 임 : 1. 변경 내역서 1부.

2. 작업지시서(1~3차) 1부.  끝.