문서번호	도로보수과-9471
결재일자	2019.12.1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	동부도로사업소장
박해웅		양기승	12/01 송만규
협조

2019년 관내 포장도로 굴착복구공사

준공 검토 보고

2019.11.

동부도로사업소

(도로보수과)

2019년 굴착복구공사 준공 검토 보고

우리 사업소에서 시행중인 『2019년 관내 포장도로 굴착복구공사(연간단가)』의 건설사업관리자로부터 공사 준공서류가 제출되어 관련 내용을 검토하여 보고드림

1		관 련 근 거

□ 설계변경(제2차, 최종) 시행 : 도로보수과-8918호(2019.11.15.)

□ 준공검사 결과보고 : 토목관리처-904호(2019.11.29.)

- 검사자 : 기술지원기술자 이상화(도로및공항)

2		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 2019년 관내 포장도로 굴착복구공사(연간단가)

□ 공사기간 : 2019. 03. 26. ~ 2019. 12. 26.

□ 공사개요 : ********************************************

□ 총공사비 : ***********************************

□ 도 급 자 : ****************************

□ 공 정 율 : 100%

3		공사 준공요청 내역

(단위:천원)

계약금액	전회기성금액	금회기성금액	누계기성금액	누계기성율	잔여금액
*************	*************	***********	*************	******	0

4		건설사업관리자 검토 결과

□ 준공물량 검토

- 준공대상 : 총 79건

- 작업기간 : 2019. 4. 8. ~ 10. 17.

- 작업물량

공 종	규 격	단위	작 업 물 량			비 고
			전회까지	금 회	누 계
굴착복구	10㎡초과	a	159.42	17.72	177.14
굴착복구	10㎡이하	a	0.70	-	0.70
차로단위복구	50a/day 기준	a	98.50	-	98.50
차로단위복구	25a/day 기준 외	a	103.20	-	103.20
기타 부대공		식	1식	1식	1식

□ 준공내역 검토

- 수량산출 및 대가적용 적정여부 확인

- 고용·산재·건강 및 장기요양보험, 국민연금보험료 등 납부 금액 확인

- 산업안전보건관리비 및 퇴직공제부금비 적정지급여부 확인

- 가설사무실및창고 : 증빙서류 미비 제외(1,900,000원 감액)

5		조 치 계 획

□ 작업완료보고서 및 건설사업관리자의 현장 확인결과 서울시 아스팔트콘크리트포장 유지보수공사 시방서 등 관련 규정에 적합하게 시공되었고 건설사업관리자가 제출한 준공 검토자료 및 ‘가설사무실, 창고’ 정산결과를 근거로 아래와 같이 감액 처리하여 “2019년 관내 포장도로 굴착복구공사(연간단가)” 준공을 시행하고자 함.

□ 정산결과

(단위:원)

계약금액	전회까지 기성지급액	금회지급액 (제3회)	누계금액 (준공금)	잔여금액 (감액)
2,184,300,000	1,959,900,000	222,500,000	2,182,400,000	1,900,000

붙임  1. 준공검사 결과보고(건설사업관리자) 1부.

2. 준공내역서 및 사진 각 1부.

3. 제3회 기성내역서 1부.

4. 공사현황 및 위치도 각 1부.

5. 청렴계약이행서약서 1부.  끝.