문서번호	방재시설부-17944
결재일자	2019.11.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		조경시설과장	방재시설부장
김달용		신용우	11/29 이임섭
협 조

『노들섬 특화공간 조성공사』

조경시설물(목재포장등4종) 변경 실정보고 검토보고

2019. 11.

도시기반시설본부

(방재시설부)

『노들섬 특화공간 조성공사』

조경시설물(목재포장등4종) 변경 실정보고 검토보고

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

『노들섬 특화공간 조성공사』책임건설사업관리기술자로 부터 조경

시설물(목재포장등4종) 변경에 대한 실정보고 사항이 있어 검토하여 보고

드림. [관련공문 : 유탑노들 제19-639호(2019.11.29)]

Ⅰ		공사개요

○ 위    치 : 용산구 이촌동 302-6 일대 (노들섬)

○ 규    모 : 연면적 9,349㎡ (지상3층 4개동 : 업무시설, 문화 및 공연시설)

□조경공사 : 수목식재(교목299주, 관목9,634주), 조경시설 31종 등

○ 기    간 : 2017.10.26 ~ 2019.11.30

○ 도 급 비 : 187.5억원 (조경 42억원)

Ⅱ		실정보고 내용

○ 보고내용

- 보행육교 목재포장 하부철물 변경

□보행육교 스틸박스 하단부에 설치계획된 설비배관이 목재포장 하부로 위치

조정됨에 따라 목재포장 하부각관 높이 변경 (각관 설치물량 494㎡ 증가)

☞ 당초 H=150mm → 변경 H=60mm, H=215mm, H=370mm

- BF인증에 적합한 수목보호대 설치 (4개소)

□서측 진입광장의 존치수목 보호대를 논슬립 압연강재로 변경

☞ 설계용역사 의견 (2019.08.02) : 장애인 통행불편이 없는 제품으로 변경

- 휴지통 변경 (3개)

□설계제품 생산중단으로 노들섬 운영사에서 설치한 휴지통과 동일디자인으로

제작하여 통일성 확보

- 하단부 계단A 자연친화적 소재로 변경 (1개소)

□사면경사 완화로 주변경관과 조화되는 목재계단으로 변경

☞ 설계용역사 의견 (2019.09.03) : 자연친화적인 소재로 동선연결

○ 도급비 승인요청                                  (단위 : 천원)

구 분	단위	당 초		변 경		증․감
		수 량	금 액	수 량	금 액
계			49,807		65,662	증)15,855
보행육교 목재포장	식	1	27,590	1	30,391	증)2,801
수목보호대	개소	4	3,499	4	3,554	증)55
휴 지 통	개	3	3,150	3	3,180	증)30
하단부 계단A	개소	1	15,568	1	28,537	증)12,969

※ 증액금액은 이용자편의 및 품질향상을 위하여 변동없이 시공 [시공사 합의서 제출]

Ⅲ		검토보고

○ 보행육교 목재포장

- 목재포장 하부로 설비배관이 변경설치되어 하지철물 높이 변동에 따른

아연도각관 및 설치품 증가

○ 수목보호대 변경

- 장애인 통행에 불편이 없도록 BF인증기관의 의견을 반영함 (논슬립)

○ 휴지통 설치

- 설계제품이 단종되어 노들섬 운영사가 설치한 디자인과 동일하게 계획

○ 하단부 계단A 위치 및 재료 변경

- 당초 상단부 차량동선에서 옹벽에 접하여 화강석판석 계단을 설치토록 계획

되었으나 옹벽녹화로 수목을 식재하고, 토공정리로 하단부 경사가 완화되어

- 하단부 유람선 선착장과 연결되는 동선으로 계획하고, 주변경관과 조화

되는 목재계단(논슬립처리)으로 변경설치 함

Ⅳ		보고자 의견

○ 조경공사 시설물 변경에 대한 책임건설사업관리기술자의 의견이 타당하다고

판단되어 제출한 실정보고는 승인조치하고

○ 변경에 따른 공사비 증가분은 반영없이 조치토록 책임건설사업관리기술자에게

통보하고자 합니다.

붙임 : 1. 위치도 및 현황사진 1부.

2. 책임건설사업관리기술자 기술검토 의견서 1부(별도첨부).  끝.

조경시설 위치도(현장사진) 및 도면

조경시설물 위치도 (하단부 계단A, 휴지통, 수목보호대, 보행육교 목재포장)

보행육교

수목보호대

휴지통

계단A

유람선선착장

하단부 유람선 선착장 연결 침목계단 설치

노들섬 운영자 기설치 휴지통

휴지통 디자인 (노들섬 운영사 디자인 채택)

서측 진입광장 수목보호대 (논슬립 압연강재로 변경설치)

보행육교 목재포장 하부 설비배관 설치 [아연도각관(동바리) 물량 증가]

설비배관설치