문서번호	설비부-19209
결재일자	2019.11.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	열빛총괄과장	설비부장
최대진	여인웅	11/29 代여인웅

『탄천물재생센터 3차총인처리시설 기계설비 공사(장기 1차)』

내역(차수조정) 설계변경(1차 2회) 및 공기연장 검토  보고

2019.11.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사(장기1차)』

내역(차수조정) 설계변경(1차 2회) 및 공기연장 검토  보고

「탄천물재생센터 3차총인처리시설 기계설비공사」선행공정인 토목공사 준공기한이 ‘20.11.14로 연기됨에 따라 총차 준공기한을 연기하고 1차분에 시공이 불가능한 내역을 제외하여 2차분으로 변경 조치사항에 대해 검토 보고 드림

Ⅰ		공 사 개 요

공 사 명 : 탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사

위    치 : 서울시 강남구 개포로 625(탄천물재생센터 내)

공사기간 : 2017. 12. 4 ~ 2020. 2. 3.(1차 ’17. 12. 4 ~ ’19. 8. 31)

규  모 : 총인처리시설 2개소 처리량 Q=450,000㎥/일

○ 1·2처리장 총인유입 및 처리설비, 농축설비, 용수공급설비, 탈취설비, 반류수이송설비 각 1식

공 사 비 : 11,715백만원(도급비 1,837백만원 / 관급비 9,878백만원)

시 공 사 : ㈜이수에이치앤씨/(주)임하엔지니어링/금수티아이(주)

감리용역 : ㈜선진엔지니어링종합건축사사무소 외 3개사

Ⅱ		관 련 근 거

기계설비공사(1차분 2회) 변경내역서 및 총가 공기연장 검토 보고

- 탄천하감 2019-387호(2019.11.28.)

공사계약일반조건 제19조(설계변경 등), 20조(설계 변경 등으로 인한 계약 금액의 조정)

Ⅲ		검토내용

내역변경 내용

○ 변경사유 : 선행공정인 토목 건축구조물 미시공으로 인하여 1차분에서 기계설비 시공이 불가능한 내역을 제외하여 2차분으로 변경 시공

○ 1차공사 내역(물량) 변경(조정) 주요내용

공 종	당초	변경	검 토 내 용	비 고
기계실기계설치(2처리장)	반영	제외	2처리장 토목구조물 미시공되어 2차분으로 변경
슬러지저류조,산기관, 선택밸브	반영	제외	토목구조물 미시공되어 2차분으로 변경
환기덕트설치(2처리장)	반영	제외	2처리장 토목구조물 미시공되어 2차분으로 변경
소방설비(2처리장)	반영	제외	2처리장 토목구조물 미시공되어 2차분으로 변경

내역변경 세부내용

○ 총차                                                   (단위 :원)

구 분	당 초	변 경	비고
기계설비	1,800,534,400	1,800,234,400	변경없음
소방설비	36,745,600	36,745,600	변경없음
도급공사비	1,837,280,000	1,836,980,000	변경없음

○ 1차분                                                    (단위 :원)

구 분		당 초	변 경	비고
도급공사비		900,000,000	363,717,810	감) 536,282,190
기계설비	소 계	882,891,863	363,717,810	감) 519,174,053
	재 료 비	261,740,828	121,482,578	감) 140,258,245
	노 무 비	294,639,440	112,876,449	감) 181,762,991
	경 비	9,777,703	2,952,882	감) 6,824,821
	간 접 비	236,471,001	93,340,646	감) 143,130,355
	부가가치세	80,262,896	33,065,255	감) 47,197,641
소방설비	소 계	17,108,137	-	감) 17,108,137
	재 료 비	7,824,177	-	감) 7,824,177
	노 무 비	4,125,341	-	감) 4,125,341
	경 비	296	-	감) 296
	간 접 비	3,603,038	-	감) 3,603,038
	부가가치세	1,555,285	-	감) 1,555,285

총차 준공기한 연기

○ 토목공사(선행공종)의 준공기한이 ‘20.11.14로 연기되었으므로 변경된 준공기한에 맞춰 기계공사의 준공기한을 ’20.12.31로 연기

○ 변경내용

구 분		당 초	변 경	비고
준공기한	총차	2020.02.03	2020.12.31	증)332일
	1차	2019.12.31	2019.12.31	변경없음

공사기한 연장사유 : 선행 공정인 토목공사 지연

귀책소재 : 도시기반시설본부

지체상금 부과여부 : 미부과

건설사업관리기술자 의견

○ 1·2처리장 토목구조물 완료시점이 ‘20.02말 예정으로 1차분 내역에서 시공이 불가능한 부분을 제외하여 2차분으로 변경처리함이 타당하며

○ 1처리장 합류혼화조 개량공사가 ’20년 9월말 예정임으로 종합시운전 착수전 기계점검 및 무부하시운전을 감안하여 2020.12.31일까지 공사기간 연장은 적정함

Ⅳ		조 치 계 획

건설사업관리단 보고사항을 검토한 결과 관련 규정에 의거하여 설계내역 조정내용(시공이 불가능한 공종은 2차분으로 변경 시공 등) 반영 및 공사기간 연장에 대하여 타당한 것으로 판단되어 이를 총무부에 변경 계약 의뢰 하고자 함.

붙임  1. 관련공문(설계변경내역서 포함)  1부.

2. 검증 확인서 각 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.