투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	관급자재 납품기한 연기 요청(동부간선도로확장 3공구 전기공사)

1. 우리 본부에서 시행중인「동부간선도로확장(3공구) 전기공사」에 소요되는 관급자재에 대하여 아래와 같이 납품기한 변경을 요청합니다.

가. 납품기한 변경내용

번호	납품요구번호	품명	계약자	계약금액	납품기한		비고
					당초	변경
1	****************	***	********	************	**********	**********	******
2	****************	***	********	************
3	***********	******	****	************			****
4	***********	******	****	************

※ 계약금액 및 수량 변경없음

나. 변경사유: 선행공사 지연 및 설치부지 사용승인 미완료에 따른 설치시기 미도래

다. 귀잭소재: 서울시특별시 도시기반시설본부

라. 지체상금: 미부과

붙임: 1. 납기연장보고서 1부.

2. 실정보고서(합의서 포함) 1부.  끝.

	설비부장
주무관	임원성		시책사업과장	이종근		설비부장	11/29 代여인웅
협조자
시행	설비부-19215	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 15층 (무교동)	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8648	/전송	02-3708-8659	/	aeioumoum@seoul.go.kr	/	부분공개(5)