＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	배수지,아리수올림터 정밀안전진단 및 안전점검 개선사항 알림

1. 배수지, 아리수올림터 정밀안전진단 및 안전점검 관련입니다.

2. ‘19년 제290회 행정사무감사(환수위) 시 배수지, 아리수올림터 관리에 대한 지적사항 및  개선사항을 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

지적사항

가. 사업소 정기점검이 형식적으로 이루어지고 있으며, 점검담당자 교육 필요.

나. 진단 및 점검 결과에 대한 보수를 조속히 시행하지 않음.

개선사항

가. 정기점검 담당자는 전회 정밀안전진단 및 정밀안전점검 지적사항을 참고하여 점검하고, 정기안전점검교육(인재개발원) 이수.

나. ‘20년 진단(점검) 용역은 9월 이전 정비예정물량 산출 완료하여 ’21년

예산에 반영․보수

* 타당성 심사 등 행정절차는 ‘19년에 완료하고 ’20년 1월 발주 및 착수

절차	시행시기	비고
타당성심사, 사전규격공개, 사업수행능력평가 기준 등	12월 이내 완료
용역 발주 및 계약	1월
사전조사 및 시설물 외부 조사	2~4월
항 내부 조사	5~6월	상반기 항청소 병행
구조해석 등 행정절차	7~8월
정비예정물량 산출	9월	익년도 시설정비 예산반영
준공	11~12월

3. 특히, 사전이행절차(타당성심사, 사전규격공개, 사업수행능력평가기준심사 등)는 ’19년 12월 이내 필히 완료하여 사업추진에 차질이 발생하지 않도록 철저를 기하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	급수(1-8),시설(1-8)
주무관	최세명		시설관리과장	유명은		시설안전부장	11/29 신용철
협조자	주무관	김동구
시행	시설관리과-11819	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동) 상수도사업본부 시설안전부 시설관리과	/
전화	02-3146-1544	/전송	02-3146-1529	/	3-man@seoul.go.kr	/	대시민공개