문서번호	원수관리과-1684
결재일자	2019.11.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
김종원		정임근	11/29 서대훈
협 조
	주무관			유혜영
	주무관			김금옥
	주무관			김효준

“상수도본부 발족 30년, 수돗물통수 111년, 믿고 마시는 아리수!”

『강북취수장 시설물 유지보수공사』

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

2019.  11.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

『강북취수장 시설물 유지보수공사』

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

우리센터에서 시행중인 『강북취수장 시설물 유지보수공사』에 대하여 설계변경 심의위원회를 개최하고 그 결과를 보고함.

□ 설계변경 심의대상

○ 공 사 명 : 강북취수장 시설물 유지보수공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2019. 5. 2. ~ 2020.4.30.

○ 계 약 일 : 2019. 4. 26.

○ 계약금액 : *************

○ 계 약 자 : **************

□ 심의 개최 현황

○ 일    시 : 2019년 11월 27일(수) 10:00

○ 심의장소 :  원수관리과 사무실

○ 참석인원 : 총 4명

- 위 원 장 : 원수관리과장

- 심의위원 : 공업6급 김효준,공업6급 김대용,공업7급 이승수

□ 설계변경 주요사항

○ 계약물량의 증감 및 신규공정 발생

신규공정	당초금액	변경금액	사유
1. 토공	1,260,114	52,786	터파기,다짐 등 감소
2.구조물공	2,157,984	730,748	구조물 보수량 감소
3. 시설물공	20,216,385	30,076,888	방화문,차양판 등 증가
4. 보수공	4,160,760	-	보수물량 미발생
5. 부대공	712,390	770,786	물량증가
6. 폐기물 및 고재처리	148,095	-32,799	폐기물 미발생 및 고재발생

○ 법령에 따른 제경비 항목 감발생

- 간접노무비, 산재보험료,고용보험료, 건강보험료, 연금보험료 등

□ 설계변경 금액

구 분	금액		증·감	비 고
	당초	변경
****	**********	**********	*	*********
***********************	**********	**********	**********
****** ****************	*********	*	**********

□ 주요 변경내역

○ 물량변경에 따른 순공사비 및 법령에 따른 제경비 증감내역

연번	공 종	금액		증·감	내 용
		당초	변경
****		**********	**********	*********	*********** *********
*	*****	*********	*********	*******	*******
*	*****	*******	*******	*******
*	****	*******	******	******
*	*****	*******	*	*******
*	*****	*******	*	*******
*	******	******	*	******
*	****	*******	*	*******
*	****	*********	*********	*******	*******
*	******	*******	*	*******	***
**************		**********	**********	*********	*******
**	*****	*********	*********	******
**	**	*********	*********	*********	****
**	******	*******	*******	*******	****
****		**********	**********	*	*
***		*********	*********	*	*
***		**********	**********	*	*

□ 심의 내용 및 결과

구 분	심의 내용	결정 내용
강북취수장 시설물 유지보수공사	〇 설계변경 타당성	〇 설계 타당함
	〇 신규공종 단가산출 타당성	〇 신규공종 타당
	〇 제경비 적정산정 및 적용	〇 제경비 실비정산 등 적정
	〇 각종 제반규정 준수여부	〇 제반규정 준수

* 본청 계약금액조정시스템에 의한 제비율 검증 실시(2019. 11. 25)

□ 조치의견

○ 공사 설계변경 심의결정 내용과 같이 물량 및 계약금액에 대한 설계변경을 시행코자 합니다.

붙임 : 1. 설계변경 심의 의결서 1부.

2. 계약금액조정(기술심사담당관) 1부.

3. 심의 의결된 변경설계서 1부.