문서번호	설비부-19206
결재일자	2019.11.29.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
정찬교		代마동훈	11/29 代여인웅
협조

『율곡로(창경궁앞) 도로구조개선 전기공사』

물가변동(제2,3회)으로 인한 계약금액 조정 검토보고

2019. 11.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『율곡로(창경궁앞) 도로구조 개선 전기공사』

물가변동(제2,3회)으로 인한 계약금액 조정 검토보고

『율곡로 창경궁앞 도로구조개선 전기공사』계약상대자로부터 물가변동 (ESC2,3회)으로 인한 계약금액 조정이 있기에 물가변동 금액 적정 여부를 검토 보고함.

1		공사개요

□  공 사 명 : 율곡로 창경궁앞 도로구조 개선 전기공사

□  공사기간 : 2014.05.15. ~ 2019.12.31.(`20.12월 연기예정)

□  위    치 : 종로구 창덕궁 돈화문 ~ 원남동 사거리(연장810m)

□  규    모 : 도로확장 4차로→6차로, 지하차도 320m

□  시 공 사 : ***************

□ 공사금액 : **********************************

□ 공 정 률 : 80%(전기)

2		관련근거

□ 지방계약법 시행령 제73조(물가변동으로 인한 계약금액 조정)

□ 율곡감 제2019-321호(`19.11.25): 건설사업관리단 물가변동 검토보고

3		계약금액 조정 내용

□  물가변동으로 인한 계약금액 조정 충족 요건(아래 ①, ② 동시 충족)

① 계약체결일로부터 90일 이상 경과

② 물가변동 지수조정률이 100분의 3이상 증감된 경우

□  계약금액 조정 검토 내용

○ 물가변동 조정현황(총괄)

조정횟수	제1회	제2회	제3회
조정방법	지수조정율	지수조정율	지수조정율
조정기준일	`16.12.31	`17.09.01 (243일 경과)	`18.05.31 (271일 경과)
조정율	3.56%	3.56%	3.20%
조정금액	22,023,000원	22,094,000원	20,164,000원

□ 물가변동 충족요건(90일 이상경과, 3%증가) 검토결과 : 적합

○ 계약금액 조정 세부검토 내용(제2회)

구 분		검토내용	비 고
계약금액(A)		**************
물가변동 제외금액(B)		************
물가변동 조정기준일 공정률	예정공정률	******
	실행공정률	******
	적용공정률	******
물가변동 적용대가(C)		************	C=A-B
물가변동 조정률(D)		*****	지수조정률 산출표 참조
물가변동 등락대상 조정금액(E)		***********	E=C*D
선급금 공제금액(F)		**	선금지급 없음
물가변동 적용금액		***********	천단위 절사

○ 계약금액 조정 세부검토 내용(제3회)

구 분		검토내용	비 고
계약금액(A)		**************
물가변동 제외금액(B)		************
물가변동 조정기준일 공정률	예정공정률	******
	실행공정률	******
	적용공정률	******
물가변동 적용대가(C)		************	C=A-B
물가변동 조정률(D)		*****	지수조정률 산출표 참조
물가변동 등락대상 조정금액(E)		***********	E=C*D
선급금 공제금액(F)		**	선금지급 없음
물가변동 적용금액		***********	천단위 절사

□  물가변동으로 인한 계약금액 조정내용(2,3회 동시적용)

구분	당초	변경후	증감액
총차	**************	**************	*************
4차	************	************	*************

4		보고자 의견

□ 계약상대자가 신청한 물가변동으로 인한 계약금액 조정 신청내용에        대한 책임 건설사업관리자의 검토 보고가 적합하다고 판단되므로,        계약부서에 계약변경 의뢰하고자 함.

붙임 : 감리단 공문 1부. 끝.