문서번호	시설관리과-23637
결재일자	2019.11.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		강서수도사업소장
이한수	정진호	이경희		11/29 배현숙
협 조

『2019년 자동제어설비 유지관리 용역』

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

2019. 11.

강서수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『2019년 자동제어설비 유지관리 용역』

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

우리사업소에서 추진중인 『2019년 자동제어설비 유지관리 용역』의 계약물량 변동 및 원가제비율 정정 등에 따른 설계변경 사유가 발생하여, 자체 설계변경 심의위원회를 개최하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ	관련근거

○ 설계변경 심의위원회 개최(2018년 자동제어설비 유지관리 용역)

- 시설관리과-22774(2018.12.12.)호

Ⅱ	용역개요

○ 용 역 명 : 2019년 자동제어설비 유지관리 용역(연간단가)

○ 계 약 자 : *************

○ 계약금액 : ******************************

○ 용역기간 : 2019. 04. 01. ~ 2020. 03. 31.

○ 용역내용 : 배수지·올림터 등 제어설비 유지보수(정기점검 및 제어설비 부품 교체 등)

○ 용역대상 : 22개소

Ⅲ	설계변경 심의위원회 개최현황

○ 일 시 : 2019.11.29.(금) 14:00

○ 장 소 : 4층 회의실

○ 안 건 :『2019년 자동제어설비 유지관리 용역』설계변경 적정성 심의

○ 심의위원 구성

- 위원장 : 시설관리과장

- 위  원 :  시설6급 문병희, 시설6급 김남구, 시설6급 이연창, 공업6급 정진호

- 간  사 : 공업9급 이한수

Ⅳ	대상안건 심의현황

○ 심의사항

- 주요 심의내용

· 설계변경의 타당성, 제경비산정 적정여부

· 1·2차수 계약금액 변동 타당성 여부

○ 공사비 변경 내역

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증/감	비 고
총 부기금액		43,829,450	43,829,450	0
1차수	‘19년 계약금액	38,648,720	33,560,490	(감)5,088,230
2차수	‘20년 계약금액	5,180,730	10,268,960	(증)5,088,230

Ⅴ	심의결과

○ 1·2차수 계약금액 및 제경비산정 변동 등 적정함.

Ⅵ	행정사항

○ 설계변경 사유가 적정함에 따라 설계변경 시행 후 행정지원과에 계약변경 의뢰하고자 함.

붙 임 : 1. 심의위원회 심의결과서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 설계변경 심의위원회 개최 공문 1부.  끝.