투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	관급자재 계약변경(납품기한 연기) 의뢰(퇴계로(2단계) 보행친화공간 재편 전기공사)

우리 본부(부)에서 시행 중인 『퇴계로(2단계) 보행친화공간 재편 전기공사』와 관련하여 소요되는 관급자재에 대해 아래와 같이 계약 변경 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 계약 변경 내역

납품요구번호	품 명	계약금액(원)	납품기한		비 고
			당 초	변 경
****************	분전반(4회로, 노출형)	**********	~ 2019.11.30.	~ 2020. 8.31.	3자단가

2. 연기사유 : 해당 전기공사의 공정일정에 맞게, 필요 관급자재 납품기한 조정

3. 납품 기한 연기 귀책소재 : 도시기반시설본부

4. 지체상금 부과 여부 : 미부과

붙 임 : 건설사업관리단 관급자재 연기 요청 보고 1부. 끝.

	설비부장
주무관	전상은		건축설비과장	代백남진		설비부장	11/29 代여인웅
협조자
시행	설비부-19204	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 15F 도시기반시설본부 설비부 (무교동)	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8628	/전송	02-3708-8659	/	jun5209@seoul.go.kr	/	부분공개(7)