“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	용역설계변경(기간연장)의뢰***********

1. ***************************************** 관련입니다.

2. 진행중인 ***********용역의 설계변경(기간연장) 및 재개약을 아래와 같이 시행하고자 하니 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : *********

나. 설계변경(기간연장) 내용

구분	용역업체	계약금액	설계변경내용(기간연장)
설계공모관리용역	*********** ***********	*************	(전) ‘18.7.17~’19.11.30
			(후) ‘18.7.17~’19.12.20

다. 귀책사유 : 우리시

따로 붙임. 1. 설계공모 관리용역 변경 보고 1부.

2. 합의각서 1부.

3. 준공기한 연기의뢰서 1부.  끝.

	도시공간개선단장
주무관	정아선		설계공모팀장	육근형		도시공간개선반장	11/29 代변종진
협조자
시행	도시공간개선단-16331	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-2133-7627	/전송	02-2133-0844	/	jas1013@seoul.go.kr	/	부분공개(6)