＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	서부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	공사 준공기한 연기에 따른 변경계약 시행 (서부수도사업소 비탈면(팔각정 하부) 보수보강공사)

1. 우리사업소에서 시행중에 있는 “서부수도사업소 비탈면(팔각정 하부) 보수보강공사” 건에 대하여 아래와 같이 변경계약(준공기한연기) 처리하고자 합니다.

가. 공 사 명: 서부수도사업소 비탈면(팔각정 하부) 보수보강공사

나. 계약업체: ㈜수인엔지니어링 대표 ***

다. 계약금액: *************

- 계약금액변동없음(추후 설계변경)

라. 준공기한연기

- 당초: 2019. 12. 02.

- 변경: 2019. 12. 20.

마. 지체상금 부과여부: 미부과

바. 연기사유: 절대공기 부족

붙임  1. 검토보고서 1부.

2. 합의서 1부. 끝.

★주무관	방만천		행정관리팀장	엄태현		행정지원과장	11/29 한병주
협조자	주무관	구준모
시행	행정지원과-25913	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)	/
전화	02)3146-3519	/전송	02)3146-3578	/	pico1@seoul.go.kr	/	부분공개(7)