문서번호	건축부-20710
결재일자	2019.11.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		복지시설과장	건축부장
남명준		조영수	11/29 임인구
협조

서울광역푸드뱅크센터 이전·건립 설계용역

준공정산 검토 보고

2019. 11.

도시기반시설본부

건 축 부

『서울광역푸드뱅크센터 이전·건립 설계용역』

준공정산 검토 보고

『서울광역푸드뱅크센터 이전·건립 설계용역』이 완료됨에 따라 설계자로부터 준공계가 제출되어 준공정산에 대해 검토하여 보고함.

1		설계개요

□ 계 약 명 : 서울광역푸드뱅크센터 이전·건립 설계용역

□ 위    치 : 성동구 송정동 74-7번지(중랑물재생센터 내)

□ 규    모 : *****************

□ 주 용 도 : 창고시설(가설건축물)

□ 용역기간 : ***********************

□ *****************

□ 설 계 자: ㈜디앤오종합건축사사무소 대표 정봉원

2		추진경위

□ 2018.08.03. : 서울광역푸드뱅크센터 이전·건립 계획수립

□ 2018.10.10. : 사업의뢰(희망복지지원과→건축부)

□ 2018.12.20. : 설계용역 계약 및 착수

□ 2019.05.15. : 공용건축물 협의신청(가설건축물 허가)

□ 2019.09.16. : 계약심사 결과 통보(계약심사과→건축부)

□ 2019.10.10. : 총사업비 변경(증액) 통보(지역돌봄복지과→건축부)

□ 2019.10.16. : 실시설계 성과품 및 준공검사원 접수

3		설계용역 정산 내용

□ 정산내용

(단위: 원)

항***	계약내용	준공내용	***	***
***	**********	**********	*	*
**********	*	*	*	*
*********	*	*	*	*
**********	*	*	*	*
*********	*	*	*	*
***********	*	*	*	*
********	*	*	*	*
*****	*********	*********	*	*
***	*********	*********	*	*
*****	*	*	*	*
**	**********	**********	*	*
*****	*********	*********	*	*
**********	*******	*******	*	*
****	**********	**********	*

□  용역준공 지연에 관한 사항

○ 사  유 : 예정공사비 대비 예산부족으로 인해 추가예산 확보시까지 용역중단

○ 용역중단 귀책사유 : 서울시

○ 관련규정 : 「지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률」시행령 제90조 제1항

5		처리방안

□ 설계용역비 및 수수료 항목 등 실비정산 내용이 관련규정에 적합함.

붙임: 준공 관련서류 1부.  끝.