문서번호	시설관리과-21172
결재일자	2019.12.2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
오해동		함태광	12/02 편병률
협조

＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂

2019년 아리수올림터 모터펌프 수리 연간단가

설 계 변 경  보 고

2019. 12.

강동수도사업소

(시설관리과)

2019년 아리수올림터 모터펌프 수리 연간단가

설계 변경 보고

「2019년 아리수올림터 모터펌프 수리 연간단가」사업완료에 따른 계약 내역서에 포함된 각종 보험료 등의 사후 정산 처리를 규정한 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준에 따라 계약 상대자로부터 준공전 정산 자료가 미제출 되었기에   이에 계약 금액 감액  조정 및 변경계약을 아래와 같이 처리 하고자 합니다.

□ 사업 개요

○ 건    명: 2019년 아리수올림터 모터펌프 수리 연간단가

○ 계약기간: 2019. 4. 15. ~ 2020. 3. 31.

○ 계약금액: 금45,863,010원

○ 계 약 자: ㈜에이치피아이 대표 최재민

□ 설계변경 사유 및 내용

○ 설계변경 사유

- 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제1장 제10절(보험료 정산) 및

건설기술진흥법 시행규칙 제61조제2항(환경보전비 산출등) 규정에 따라  준공 전 정산 자료 미제출에 따른 계약금액 감액

○ 설계변경 내용

- 계약금액: 변동 있음

구분	계약금액(원)		증.감
	당 초	변 경
오금아리수올림터 모터펌프 교체	45,863,010	45,023,000	감840,010

-  세부변동 사항

구분	당초	변경
연금보험료	294,123원	감294,123원
건강보험료	211,115원	감211,115원
노인장기요양보험료	17,966원	감17,966원
환경보전비	102,737원	감102,737원

□ 조치계획

○ 상기 변경 사항에 대하여 자체 설계변경 심의위원회를 개최하고 심의 결과에 따라 설계변경을 시행코자 함.

○ 설계변경 심의위원회

- 일 시: 2019. 12. 3.(화) 10:00

- 방 법: 설계변경 서류 심의

- 내 용

․설계변경의 타당성

․기타 관련 규정 준수 여부

- 위 원

․ 시설관리과 위원장 편병률, 위원 송종학, 김주경, 함태광

․ 급수운영과 위원 임인택, 양재덕

붙임  1. 설계변경 내역서 1부

2. 설계변경 심의 설명 자료 1부.  끝.