문서번호	기전과-11912
결재일자	2019.12.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
이성도		12/02 代김흥식
협조

『교통안전시설 원인자부담공사(구로고가차도 철거)』

현장 실정보고에 대한 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 12.

강서도로사업소

(기전과)

『교통안전시설 원인자부담공사(구로고가차도 철거)』

현장 실정보고에 대한 검토보고

우리사업소에서 승인한 교통안전시설(신호) 원인자부담공사와 관련    감리사로부터 현장 실정보고서가 제출되었기에 검토보고 드림.

Ⅰ		관 련 근 거

교통관리과-13206(2018.05.31.)호

설비부-18119(2019.11.15.)호

TR-감-19067(2019.11.29.)호

Ⅱ		공 사 개 요

공 사 명 : 구로고가차도 철거 전기공사

원 인 자 : 도시기반시설본부

공사기간 : 2018.12.08. ~ 2019. 08. 30.

공사장소 : 남부순환로(가리봉파출소~LF팩토리아울렛구로점)531m구간

공사개요 : 교통신호기(차/보) 신설 및 이설

관련업체 및 주요설치 내용

구 분	설 계	감 리	시공업체	승인주요내용
신호기	㈜트래픽스	㈜트래픽스	㈜이화이앤지	제어기 신설 및 철거 각 1대 지주 신설 7본, 이설3, 철거 7본 신호등 신설 9조, 이설 25조, 철거 12조 선로지중화

Ⅲ		감리사 실정보고 내용

보고내용

- 공사지연으로 인한 준공기한 연기

- 현장여건에 따른 공사물량 증감발생

주요변경내용

구 분	승인 전	승인 후	비 고
공사기간	2018. 12. 08. ~ 2019. 08. 30.	2018. 12. 08. ~ 2019. 12. 13.	105일 증

- 공사기간 연장

- 공사물량 변경

구 분		변경 전	변경 후	변경사유
지주	신설	7	8	현장 여건에 따른 지주 수량 변경
	이설	3	1
	철거	7	9
신호등	신설	9	24	노후 신호등 교체
	이설	25	24
	철거	12	30

※ 변경 상세내역 : 붙임의 실정보고서 참조

Ⅳ		검 토 결 과

감리사 실정보고에 대하여 승인하고자 함

Ⅴ		행 정 사 항

원인자, 감리사 및 유관기관 승인 통보

붙임 1. 원인자공문 및 감리사 기술검토의견서 1부.

2. 설계변경내역서 및 설계도면(변경후) 1부.  끝.