＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	강북아리수정수센터
수신자	행정관리과장
(경유)
제 목	설계변경 및 차수별 금액변경 시행(강북취수장 시설물 유지보수공사-연간단가)

우리센터에서 시행중인 『강북취수장 시설물 유지보수공사(연간단가)』에 대하여 설계변경 심의위원회 개최결과에 의거 아래와 같이 설계변경 및 차수별 금액변경를 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 강북취수장 시설물 유지보수공사(연간단가)

나. 도 급 자 : 광력건설(주) 대표 권지영

다. 계약기간(변경전) : 2019. 5. 2. ~ 2020. 4. 30.

계약기간(변경후) : 2019. 5. 2. ~ 2019. 12. 5.

-  기간 변경사유 : 2차수 계약금액 공사완료로 설계변경후 준공처리

구 분	당초금액(원)	변경금액(원)	증·감(원)
총 부기금액	44,100,600	44,100,600	변경없음
1차수 금액	40,573,000	44,100,600	증 3,527,000
2차수 금액	3,527,000	-	감 3,527,000

마. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 원수비및취수비, 수선유지교체비

붙임 : 1) 설계변경 시행보고서 1부.

2) 심의 의결서 1부.

3) 설계변경내역서 1부.

4) 제경비검증확인서(기술심사담당관)1부.

5) 제경비증빙서류 1부.

6) 합의서 1부. 끝.

	강북아리수정수센터소장
주무관	김종원		원수관리과장	정임근		강북아리수정수센터소장	12/02 서대훈
협조자	주무관	김대용		주무관	유혜영		주무관	김금옥
시행	원수관리과-1695	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-5874	/전송	02-3146-5807	/		/	부분공개(5)