투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	공사기간 변경 2건 의뢰(남산3호터널 및 금화터널 조명설비 개선사업 전기공사)

우리 사업소에서 시행 중인 ‘남산3호터널 조명설비 개선사업 전기공사’ 및 ‘금화터널 조명설비 개선사업 전기공사’의 공사기간 부족으로 기한 내 준공이 불가하여 아래와 같이 공사기간 변경을 의뢰드리오니, 검토 후 처리하여 주시기 바랍니다.

○ 변경내용

공 사 명	계약상대자	계약금액[원]	계약일자	공 사 기 간
				당 초	변 경
남산3호터널 조명설비 개선사업 전기공사	㈜세종전설 (대표자 : 원종섭)	476,922,836	2019. 10. 31.	2019. 11. 04. ~ 2019. 12. 05.	2019. 11. 04. ~ 2019. 12. 23.
금화터널 조명설비 개선사업 전기공사	㈜금산트리피아 (대표자 : 김백순)	352,193,400	2019. 10. 29.	2019. 10. 30. ~ 2019. 12. 05.	2019. 10. 30. ~ 2019. 12. 23.

※ 변경사유 : 관급자재 공급지연 및 터널 작업효율 저하 등으로 절대공기 부족

붙임  1. 공사기간 연장 검토 보고서 1부.

2. 합의각서 각 1부.  끝.

	기전과장
주무관	김성균		주무관	代김성균		기전과장	12/02 서수일
협조자	주무관	장재영
시행	기전과-13339	(		)	접수		(		)
우	03918	서울특별시 마포구 가양대로 203 서부도로사업소 기전과 (상암동)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-300-8394	/전송	02-300-8410	/		/	부분공개(7)