문서번호	토목부-22105
결재일자	2019.12.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
권해엽		장종환	12/02 김용제
협조	주무관		황윤기
	주무관		노순재

암판정(STA.0+920~1+200) 결과 검토보고

- 동부간선도로 확장공사(1공구) -

2019. 12.

도시기반시설본부

(토목부)

암판정(STA.0+920~1+200) 결과 검토보고

- 동부간선도로 확장공사(1공구) -

초안산 지하차도 터파기 진행 중 암반층이 발견되어 2차례의 암판정을 실시하고 그 결과를 검토 후 보고드림.

※ 관련근거 : 도화(동부간선) 2019-205호(2019.10.02.)

Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명 : 동부간선도로 확장공사(1공구)

○ 공사규모 : 도로확장 4차로→6차로, 연장 1,400m

○ 도 급 비 : 29,231백만원(7차 8,000백만원)

○ 공사기간 : ′08.12. ~ ′21.06.(7차 ′19.01. ~ ′19.12.)

○ 시 공 사 : ㈜풍산건설 외 1  /   감 리 사 : ㈜도화엔지니어링

Ⅱ		감리단 검토내용

○ 검토배경

- 초안산 지하차도(STA.0+920~1+200) 터파기 작업 중 암반층이 발견되어 2차례의 암판정 위원회를 거쳐 암판정을 실시하고 발생된 암석에 대하여 매각 후 이를 설계에 반영하고자 보고드림.

○ 추진경위

- 2019.05.27. : 1차 암판정(STA1+000~1+190) - 리핑암, 발파암

- 2019.05.27. : 2차 암판정(STA0+920~1+060) - 리핑암

- 2019.10.01. : 토석 정보 공유 시스템 암매각 공고

- 2019.10.09. : 암매각 설명회 실시(현장 상황실)

· 입찰가격 : 골재 채취법에 의거 골재 선별 파쇄업 등록 업체이며 행정구역상 서울시, 경기도(의정부, 양주, 남양주, 하남)에 사업장 및 야적장 소재 업체

○ 위치도 및 횡단면도

○ 토질 주상도

○ 암판정 위원회 결과

- 1차 암판정 위원회 결과

연 번	위 치	부위	암반선 E.L(m)		판정결과	비고
			당초	변경
1	본선 1+000	초안산지하차도	토사	24.32(CL좌측4.83m)	리핑암
2	본선 1+020	초안산지하차도	토사	26.40(CL좌측4.59m)	리핑암
3	본선 1+040	초안산지하차도	토사	25.56(CL좌측6.38m)	리핑암
4	본선 1+060	초안산지하차도	토사	25.71(CL좌측2.24m)	리핑암
5	본선 1+080	초안산지하차도	토사	25.97(CL좌측6.32m)	연암
6	본선 1+100	초안산지하차도	토사	24.46(CL좌측5.59m)	리핑암
				23.55(CL좌측5.59m)	연암
7	본선 1+110	초안산지하차도	토사	26.22(CL좌측2.02m)	리핑암
				23.82(CL좌측2.02m)	연암
8	본선 1+120	초안산지하차도	토사	26.26(CL우측2.68m)	연암
9	본선 1+140	초안산지하차도	토사	25.88(CL좌측4.45m)	연암
10	본선 1+150	초안산지하차도	토사	25.45(CL좌측5.10m)	연암
11	본선 1+160	초안산지하차도	토사	26.00(CL좌측5.71m)	연암
12	본선 1+170	초안산지하차도	토사	26.09(CL좌측2.75m)	연암
13	본선 1+180	초안산지하차도	토사	25.70(CL좌측7.85m)	리핑암
				23.40(CL좌측7.85m)	연암
14	본선 1+190	초안산지하차도	토사	23.68(CL좌측8.14m)	리핑암
				24.86(CL좌측8.14m)	연암

- 2차 암판정 위원회 결과

연번	위 치	부위	암반선 E.L(m)		판정결과	비고
			당초	변경
1	본선 1+000	초안산지하차도	토사	24.32(CL좌측4.83m)	리핑암
2	본선 1+020	초안산지하차도	토사	26.40(CL좌측4.59m)	리핑암
3	본선 1+040	초안산지하차도	토사	25.56(CL좌측6.38m)	리핑암
4	본선 1+060	초안산지하차도	토사	25.71(CL좌측2.24m)	리핑암
5	본선 1+080	초안산지하차도	토사	25.97(CL좌측6.32m)	연암
6	본선 1+100	초안산지하차도	토사	24.46(CL좌측5.59m)	리핑암
				23.55(CL좌측5.59m)	연암
7	본선 1+110	초안산지하차도	토사	26.22(CL좌측2.02m)	리핑암
				23.82(CL좌측2.02m)	연암
8	본선 1+120	초안산지하차도	토사	26.26(CL우측2.68m)	연암
9	본선 1+140	초안산지하차도	토사	25.88(CL좌측4.45m)	연암
10	본선 1+150	초안산지하차도	토사	25.45(CL좌측5.10m)	연암
11	본선 1+160	초안산지하차도	토사	26.00(CL좌측5.71m)	연암
12	본선 1+170	초안산지하차도	토사	26.09(CL좌측2.75m)	연암
13	본선 1+180	초안산지하차도	토사	25.70(CL좌측7.85m)	리핑암
				23.40(CL좌측7.85m)	연암
14	본선 1+190	초안산지하차도	토사	23.68(CL좌측8.14m)	리핑암
				24.86(CL좌측8.14m)	연암

○ 강도시험 의한 암판정 결과

- 암종별 탄성파 속도 기준

암종그룹		자연파상태의 탄성파 속도 (km/sec)	암편 탄성파속도 (km/sec)	비고
풍화암	A	0.7~1.2	2.0~2.7
	B	1.0~1.8	2.5~3.0
연암	A	1.2~1.9	2.7~3.7
	B	1.8~2.8	3.1~4.2
보통암	A	1.9~2.9	3.7~4.7
	B	2.8~4.1	4.3~5.1
극경암	A	4.2이상	5.8이상
	B

- 암석 일축압축강도에 의한 분류

구 분		풍화암	연암	보통암	경암	극경암
일축압축강도	kmf/㎠	125이하	125~400	400~800	800~1,200	1,200이상 경우에는 1,800
	Mpa	12이하	12~40	40~78	78~118	118이상 경우에는 177

- 암시편 시험 의뢰 결과 및 판정 결과

시험 검사종목			기준치 (연암이상)	결과 (평균)	판정	내역 적용	비고
시편1	압축강도	Mpa	12이상	66.3	보통암	연암
	탄성파속도	m/s	2,700이상	3,627	연암
시편2	압축강도	Mpa	12이상	107.2	경암	연암
	탄성파속도	m/s	2,700이상	3,776	보통암

○ 비파괴(스마트 함마) 시험 결과

위 치	평균경도	판정	내역적용	비고
STA0+960, EL20.46	21.1	풍화암	풍화암
STA1+040, EL25.56	22.5	풍화암	풍화암
STA1+120, EL26.26	43.4	보통암	연암
STA1+160, EL26.00	44.3	보통암	연암

※ 적용 기준 : 풍화암 : 25이하, 연암 25~35, 보통암 35~45

○ 수량 증·감 현황

규 격	단위	수 량		증 ‧ 감	비 고
		당초	변경
토사	㎥	29,626.06	17,769.70	-11,858.36
리핑암	㎥		7,895.00	7,895.00
발파암	㎥		3,961.36	3,961.36
계	㎥	29,626.06	29,626.06	-

○ 암매각 결과

- 참가 업체

상호명	*********	*******	***********
소재지	*******	********	********
대표자	***	***	********
기타	***************	***************	***************

- 개찰 결과

구 분	*********	*******	***********
발파암(연암)	***********	********	***********
리핑암	***********	***	*************
계	************	********	*******
낙 찰	*

※ 반출 일정 : 2019.10.28. ~ 2019.11.30.(현장여건 변동 시 연장 가능)

○ 단가적용

구 분	주 요 내 용	비고
신규비목	○ 지방계약법 시행령 제74조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정) 제4항의3호「지방자치단체에서 설계변경을 요구한 경우(계약상대자에게 책임 없는 사유로 인한 경우를 포함)」에 의거 “계약대상자의 책임 없는 사유”에 해당하므로 신규 협의단가 적용. ○ 흙깍기(발파암) 외 2개 공종 협의율 적용 ▷ 신규단가 적용 : 83.982%(협의율적용) - [67.965%(낙찰율) + 100%(설계가)] / 2 = 83.982%.	적용

○ 공사비 증·감 현황                                        (단위 : 천원)

명 칭		금 액			비고
		당 초	변 경	증, 감
암판정	직접공사비	***********	************	************	*
	간접공사비	**********	************	***********
	물가변동액	***********	**********	***********	*
	계	***********	************	************	*
암매각		**	************	************	*
공급가액		***********	************	************	*
부가가치세 (공급가액x10%)		**********	***********	************	*
합 계		***********	************	************	*

○ 감리단 종합의견

- 초안산지하차도(STA.0+920~1+200지점)의 터파기공사 진행 중 발견된 암반층에 대한 2차에 걸친 암판정 위원회 및 시험결과 등의 암판정 결과에 따라 수량 변경함이 타당하다고 판단되며,

- 발생된 암석에 대하여 토석정보공유시스템(국토교통부)에 매각 공고에 따라 매각 처리하고, 매각대금은 도급내역에서 공제함이 적정하다고 판단되므로,

- 사업의 시급성을 감안 우선 시행 조치하고 향후 설계변경 시 반영함이 타당하다고 사료됨.

Ⅲ		조치계획

○ 감리단의 검토의견이 타당하여 승인조치하고 추후 설계변경 자문위원회를 거쳐 반영하고자 함.

붙임  감리단 검토 의견서 1부.  끝.