문서번호	설비부-19401
결재일자	2019.12.2.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
박도원		오삼록	12/02 임정규
협조

『남산예장자락 재생사업 기계설비공사』

에스컬레이터 납품기한 연기 검토보고

2019. 12.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『남산예장자락 재생사업 기계설비공사』

에스컬레이터 납품기한 연기 검토보고

『남산예장자락 재생사업 기계설비공사』와 관련하여 감리단으로 제출된 관급자재 에스컬레이터 납품기한 연기 요청에 대한 검토 결과를 아래와 같이 보고 드림.

1		공 사 개 요

○ 공 사 명: 남산예장자락 재생 기계설비공사

○ 공사규모: 공원 15,154㎡, 주차장 10,015㎡(버스 39대, 장애인 2대)

○ 용    도: 자동차관련시설(주차장 및 부대시설)

○ 공사기간: 2017. 09. 01. ~ 2019. 12. 31.

○ 공사금액: **************************************

○ 시 공 사: ************

○ 책임건설사업관리단: ㈜동성엔지니어링 외 2개사

2		관 련 근 거

○ 납품기한 변경 요청(남산예장 감리 제2019-546, ‘19.12.02.)

3		검 토 내 용

○ 관급자재 납품기한 연기

건 명	계 약 자	계약금액	납품기한		비고
			당 초	변 경
************	********	***********	**********	**********	******

(단위 : 원)

- 연기사유: 주공정(건축) 공기연장에 따른 관급자재 납품기한 조정

- 귀책소재: 서울특별시 도시기반시설본부

- 지체상금 부과여부: 미부과

○ 건설사업관리단 검토의견

- 선행공정(건축)의 공사기간 연장에 맞춰 납품기한을 연기하는 것이 적정한 것으로 판단됨.

4		보고자 의견

○ 선행공종(건축) 공기연장에 따른 기계설비공사 관급자재(에스컬레이터) 납품기한 연기는 적정한 것으로 판단되므로 계약부서에 관급자재 변경계약을 의뢰하고자 함.

붙임  관련공문 1부.  끝.