문서번호	설비부-19421
결재일자	2019.12.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
마동훈		오삼록	12/02 임정규
협 조

『창덕궁앞 도성한복판 주요가로 전기공사』

관급자재 납품기한 연장 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019.12.

도시기반시설본부

(설비부)

『창덕궁앞 도성한복판 주요가로 전기공사』

관급자재 납품기한 연장 검토보고

『창덕궁앞 도성한복판 주요가로 전기공사』에 따른  관급자재

설치시기 미도래로 인한  납품기한 연장 검토에 대하여 보고 드림.

Ⅰ		관련근거

□ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제13장(제8절 2.계약기간의 연장)

□ 공사계약 일반조건 제26조(계약기간의 연장)

□ 전기공사 관급자재 납품기한 연기요청

-  창덕궁감 2019-224호(2019.11.29.)

Ⅱ		사업개요

□ 공사명  : 창덕궁앞 도성한복판 주요가로 전기공사

□ 공사기간 : ‘19.01.11.~’20.8.31.(1차 : ‘19.01.11.~’20.7.31.)

□ 공사비 : 도급액 금1,069,240747원(1차 : 금532,000,000원)

□ 감리사 : ㈜경동엔지니어링, ㈜대한콘설탄트

□ 시공사 : ㈜유니시스엔지니어링

□ 공정율 : 15%

Ⅲ		납품기한 연장

□ 대상 관급자재

계약번호 (납품요구번호)	계약자	품 명	계약금액	납품기한
				당초	변경(연기)
*********** ***************	*********	************	**********	***********	***********
*********** ***************	*********	***********	*********	***********	***********
*********** ***************	*********	******	**********	***********	***********
*********** ***************	*******	***********	**********	***********	***********
*********** ***************	********	***********	**********	***********	***********
*********** ***************	*********	***********	**********	***********	***********
*************	*******	*********************	**********	***********	**********

□ 사  유 : 관급자재 설치 여건 미도래

○ 건설사업관리자 의견

“창덕궁앞 도성한복판주요가로 전기공사”의 공기 연장에 따른 관급자재

현장 납품여건 미도래로 납품기한을 연장하고, 적기에 수급하여 원활한

공사진행이 가능하도록 함이 타당함.

□ 귀책소재 : 서울특별시 도시기반시설본부

□ 지체상금부과여부 : 미부과

□ 계약금액 : 변동없음

Ⅳ		보고자 의견

□ 주공정(토목)의 공기연장에 따른 후속공정 전기공사의 공기연장으로

현 공정상 관급자재 설치 시기가 미도래하였고, 공사장 여건상(도성

한복판) 자재 보관장소 부재로 위 내용과 같이 관급자재 납품시기를

연장하고 적기에 수급함이 타당하다고 사료됨.

첨부 : 관급자재 납품기한 연기요청(책임건설사업관리기술자) 1부. 끝.