문서번호	시설관리과-25175
보존기간	년
결재일자	2019.12.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

주무관		기전팀장	시설관리과장
임영택		윤덕묵	12/02 고신석
협조

설계변경 심의결과 보고 「노량진아리수올림터 송수펌프 성능개선」

2019. 12.

남부수도사업소

(시설관리과)

설계변경 심의결과 보고

「노량진아리수올림터 송수펌프 성능개선」

「노량진아리수올림터 송수펌프 성능개선」관련 계약물량(감)에 따라 설계변경 심의를 실시하고 그 결과를 보고드림

□ 계약개요

○ 계약건명 : 노량진아리수올림터 송수펌프 성능개선

○ 계약기간 : 2019.09.30. ~ 2019.12.29.

○ 계약업체 : ㈜신한알앤디    대표 : 오일선

○ 계약금액 : 금94,100,000원

○ 사업내용 : 펌프내부 표면조도 개선

- 930Kw 대방배수지 송수펌프(대방6호) 1대

- 720Kw 상도배수지 송수펌프(상도1호) 1대

□ 심사위원회 개최결과

○ 심의일시 : 2019. 11. 29.(금)(10:30)

○ 심의장소 : 시설관리과 사무실(2층)

○ 심의내용 : 계약물량 증・감 등 적정 심의

○ 참석위워

- 위원장 : 시설관리과장 고신석

- 위  원 : 급수운영팀장 서규석, 급수관리팀장 이일로

급수운영과 류태현

- 간  사 : 시설관리과 배승철

□ 위원회 심의결과 : 적정

○ 설계변경 타당성 : 타당

○ 계약물량 변동(증・감)사항 적정성 여부 : 적정

○ 제경비 적정 산정 및 적용 적정성 여부 : 적정

○ 각종 제반규적 준수여부 : 준수

□ 설계변경 사유

○ 노량진아리수올림터 상도1호 펌프 성능개선 제외(본부 시설관리과 협의)

- 성능개선 효과 미미(현재 81.4% → 예상 82%)

○ 설계변경 금액

(단위 : 원)

구분	당초 금액	변경 금액	증․감	비고
총 금액	94,100,000	56,652,000	감37,448,000

□ 처리의견

○ 설계변경 심의위원회 개최결과 적정하게 설계변경된 것으로 심의되어 행정지원과에 변경계약 의뢰하고자 합니다.

붙임 : 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 설계변경 심의 의결서 1부.

3. 설계변경 합의서 1부.  끝.