＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	남부수도사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	공사현장 실정보고(사토장 변경)에 대한 회신

1. 서울시설공단 공사감독2처-18578(2019.11.20.)호와 관련입니다.

2.『독산3동 991-18~독산2동 1038-1번지 외 1개소 노후 송배수관 정비공사』현장 실정보고(사토장 변경)에 대해 아래와 같이 검토 후 승인 통보하오니 공사추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

○ 검토의견

구 분	서울시설공단	남부수도사업소
사토장 변경	○ 발생토 불량에 따른 수도권매립지 반입 불가 현장에서 발생된 굴착토가 불량하여 수도권매립지관리공사로부터 부적합 판정을 받아 반입불가 통보되어, [관련근거 : 매립지관리처-3300(2019.11.13.)] 향후 발생하는 토사에 대하여 처리가 가능한 대체 사토장을 선정하여 처리해야 하는 실정임. ○ 사토장 변경 - 당 초 : 집하장~수도권 매립지(운반거리:L=41.1km) - 변 경 : 집하장~화성시 서신면 장외리 산9-1 (운반거리: L=48.95㎞) ○ 변경 사토장의 현장 확인결과 사토장으로 사용가능한 부지 면적(67,701㎡)을 확보하고 있으며, 개발행위 허가사항, 운반거리, 진입로 등이 사토장으로 사용하기에 적정한 것으로 판단되며, 사토장 변경에 따른 거리 증가로 인하여 단가는 당초에 비해 증가(968원)하였으나 기존 계약단가로 적용.	○ 독산3동991-18~독산2동1038-1번지 외 1개소 노후 송배수관 정비공사 시행으로 발생한 잔토는 수도권매립지에 반입하여 처리중에 있었으나, 1구간 발생 잔토에 대해 반입 요청시 토사내 나무뿌리, 암 등이 확인되어 반입이 불가하다는 회신을 받은 바, ○ 원활한 공사 시행을 위해 서울시설공단에서 검토한 바와 같이 개발행위 허가사항, 운반거리, 진입로 등을 감안, 사토장으로 사용이 적정한 화성시 서신면 장외리 산9-1으로 사토장 변경을 승인하여 발생토사를 처리하고자 하며, ○ 사토장 변경 및 운반거리의 증가로 인한 운반단가가 상승에 대해선, 기존 계약단가를 적용하여 공사비 변동없이 시행하고자 함.

끝.

	남부수도사업소장
★주무관	유동훈		급수관리팀장	이일로		급수운영과장	12/02 이성환
협조자	주무관	류태현
시행	급수운영과-22644	(		)	접수		(		)
우	07062	동작구 여의대방로 10길 97	/
전화	02-3146-4576	/전송	02-3146-4589	/		/	부분공개(5)