문서번호	토목과-14851
결재일자	2019.12.2.
공개여부	비공개
방침번호

주무관		토목팀장		토목과장		안전건설교통국장
이성환		유은중		오석관		12/02 손경철
협조
	재무과장		홍명안
	계약팀장		양영종

★ ◉

「금호로 확장 공사 건설사업관리용역(장기계속계약)」 설계변경 검토 보고(총차1회, 2차1회)

2019.  12.

(안전건설교통국 토목과)

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 ☑ 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 □ 공약(약속)사업 ☑ 계속사업 □ 인센티브/공모사업 □
소통분야 고려사항		●	구민		:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	전문가		:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	이해당사자		:		유 □ ( ) 무 ☑
기타 고려사항		일 자 리 □ 환경영향 □ 안 전 □ 유지비용 □ 바른 공공언어 □
		성 인 지 □ 취약계층 □ 장 애 인 □ 디 자 인 □ 갈등발생 요인 □
타자원 활용		●	중앙부처	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	서울시	:		유 ☑ ( 도로계획과 ) 무 □
		●	기업	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	민간단체	:		유 □ ( ) 무 ☑
언론홍보 계획		기획보도 □ 보도자료 □ SDTV □ 성동뉴스레터 □ 성동구소식지 □
		기 고 문 □ 전자행정서비스 □ S N S □ 기타 (리플릿 등) □ 없 음 ☑
	● 홍 보 제 목 :
	● 중점 홍보사항

「금호로 확장 공사 건설사업관리용역(장기계속계약)」

설계변경 검토 보고(총차1회, 2차1회)

금호로 확장 공사 건설사업관리단으로부터 설계변경(총차1회, 2차1회) 사항이 접수되어 아래와 같이 검토 보고함

관련근거

진우 제19-639호(2019.12.02.) 건설사업관리용역 설계변경서 제출

공사개요

용 역 명: 금호로 확장 공사 건설사업관리용역(장기계속)

용역규모: 도로확장 폭 15→20m, 연장 120m

용역기간

- 총차: 2018. 9. 11. ~ 2020.  9. 10.

- 1 차: 2018. 9. 11. ~ 2019.  3.  9. (준공)

- 2 차: 2019. 3. 10. ~ 2019. 12. 31.

총용역비: 515,172천 원(시비)

건설사업관리단: ㈜진우엔지니어링코리아 외 2개사

설계변경 사유

공사장 안전사고 예방을 위한 기술자 추가 투입

- 토목부-19862호(행정2부시장 방침 제280호 관련) 「감리분야 개선대책」으로 출퇴근 7·4제 시행에 따른 감리원 추가 투입

시공사 업무개시 시간과 동일하게 오전 7시 출근 후 오후 4시에 퇴근하고 남은 작업시간은 다른 감리원이 감독 시행

⇒ 일 2명이상 감리 상주로 공사현장 관리 철저

에스컬레이터 추가설치 등에 따른 기술자 추가 투입

- 신금호역 1번 출입구 에스컬레이터 추가 설치에 따라 건축 및 전기분야 기술자 추가 투입

고층건축물 철거시 안전관리를 위한 건축분야 기술자 추가 투입

- 사업구간내 고층건물(옥탑포함 9층) 철거시 안전관리를 위하여 건축분야 기술자 추가 투입

기술자 투입 현황

- 총 건설사업관리기술자: 당초 48.00인/월 ⇒ 변경 57.73인/월

☞ 책임기술자        24.0인/월 ⇒ 24.0인/월

☞ 토목분야 기술자   14.4인/월 ⇒ 20.8인/월

☞ 건축분야 기술자    5.0인/월 ⇒  9.6인/월

☞ 전기분야 기술자    2.0인/월 ⇒  2.0인/월

설계변경 내역

총차 1회

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감		비 고
용 역 비	515,172,000	600,000,000	증	84,828,000

※ 총 용역비 증액분은 낙찰차액(시비) 사용

2차 1회(총차 범위내 기술자 투입일수 조정)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감		비 고
용 역 비	217,910,000	253,220,000	증	35,310,000

조치계획

건설기술용역 대가 등에 관한 기준에 의거 변동사항에 대하여 위와 같이 설계변경을 시행하여 공사장 안전사고를 예방하고 적기에 사업을 완료할 수 있도록 건설사업관리업무에 만전을 기하고자 함

변경계약 완료 후 잔여분 3차계약 체결하여 잔여공사 건설사업관리 추진

붙임  변경설계서 각 1부.