문서번호	정수시설과-7735
결재일자	2019.12.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장
박종민		12/02 남효돈
협조

광암아리수정수센터 제초작업 및 조경관리용역 설계변경 심의결과 보고

2019. 12.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

설계변경 심의결과 보고

우리 정수센터에서  시행 중인『광암아리수정수센터 제초작업 및 조경관리용역』설계변경 자체 심의위원회를 개최하고 결과를 보고합니다.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2019년 광암아리수정수센터 제초작업 및 조경관리용역

○ 용역기간 : 2019. 03. 18. ~ 12. 20.

○ 도 급 비 : 147,978천원

○ 도 급 자 : 예림조경 대표 홍건표

□ 심의위원회 개요

○ 일    시 : 2019.12.02.(월) 10:00

○ 구    성

- 위원장(1) : 정수시설과장

- 위  원(3) : 공업6급 박희준, 시설6급 신중선, 공업7급 정인석

○ 안    건

- 현장여건 반영 및 공종별 물량변경에 따른 설계변경 적정성

- 제경비(보험료) 정산 및 제비율 요율 산정의 적정성 등

□ 설계변경 심의내용

○ 현장여건에 따른 공사내용 적정성 여부

○ 공종별 물량변경에 따른 설계변경의 적정성 여부

○ 제경비 정산 및 제비율 요율 산정의 적정성 여부 등

○ 공사비 변경사항

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 감
총공사비		147,978,500	147,609,000	감)369,500
도급비	공급가액	134,525,909	134,190,000	감)335,909
	부가가치세	13,452,591	13,419,000	감)33,591
	계	147,978,500	147,609,000	감)369,500

□ 심의결과 : 적정함

○ 현장여건에 따른 공종별 물량변경 및 제경비 정산 등에 따른 설계변경이 적정하게 반영되었음.

□ 조치계획

○ 설계변경 심의결과 적정하므로 이에 따라 설계변경 시행코자 함.

붙    임  1. 설계변경 심의 결과서 1부.

2. 변경내역서 1부.

3. 검증확인서 1부.  끝.