문서번호	도로보수과-12201
결재일자	2019.12.3.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		도로보수과장	서부도로사업소장
정의현		강종훈	12/03 이학구
협 조
	주무관			이상하

2019년 도로부속시설물 일상유지보수공사작업지시 검토 보고(제5차)

2019. 12.

서부도로사업소

(도로보수과)

『2019년 도로부속시설물 일상유지보수공사』

작업지시 검토 보고(제5차)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2019년 도로부속시설물 일상유지보수공사(연간단가)

○ 계약기간 : 2019.03.29. ~ 2019.12.31.

○ 시 공 사 : ******************

○ 도 급 비 : ************

○ 공    종 : 과속방지턱 도색 107[eqn: m ^{2}], 옹벽표면보수 579[eqn: m ^{2}], 사괴석보수 44[eqn: m ^{2}], 중앙분리대설치 38경간, 도로부속물 세척 15,773[eqn: m ^{2}] 등 기타

※ 성산로 중앙분리대 철거공, 소파로 중앙분리대 철거공, 합정역 중앙버스정류장 정비공, 도로옹벽 보수공 추가

□ 보고내용

○ 개방형 중앙분리대 단부처리시설 설치 : 8개소

- 기 도로중앙분리대가 설치된 증산로, 월드컵북로, 가양대로, 성산로 등 4개 노선은 중앙선 폭이 좁아 충격흡수시설 설치가 어려워 충격흡수시설 대신 개방형 중앙분리대 단부처리시설을 설치하여 교통 사고위험을 줄이고자 함.

○ 제설전진기지 로고 정비

- 2016년 강변북로(망원동 222)상에 제설전진기지 설치 이후, 잦은 교통사고 및 탈색으로 인해 로고가 많이 훼손되어, 제설기간 중 홍보효과가 절감되어서 훼손된 부분을 정비하고자 함.

○ 제5차 작업지시

- 건    명 : 2019년 도로부속시설물 일상유지보수공사 작업지시(제5차)

- 작업위치 : 강변북로 제설전진기지 및 증산로 외 3개소

- 작업기간 : 2019.12.03. ~ 2019.12.15.

- 필요금액 : **************************

- 공종 및 물량

연번	노선명	공 종	규격	수량	단위	비고
1	강변북로 (제설기지)	로고정비	-	1,003.6	㎡
2	증산로	중분대 철거	-	6	경간
		중분대 단부처리시설	H900*W6900-ET2등급	3	개소
3	월드컵 북로	중분대 철거	-	4	경간
		중분대 단부처리시설	H900*W6900-ET2등급	2	개소
4	가양대로	중분대 철거	-	2	경간
		중분대 단부처리시설	H900*W6900-ET2등급	1	개소
5	성산로	중분대 철거	-	4	경간
		중분대 단부처리시설	H900*W6900-ET2등급	2	개소
안전시설비			-	1,500	㎡

○ 도급비 집행

- 도로부속시설물 일상유지보수공사 시설비 예산 집행잔액 및 응암로 철제중앙분리대에서 무단횡단금지시설로 변경 설치로 인한 관급비 집행잔액을 사용하여 보수하고 향후 설계변경을 통해 정산코자 함.

□ 조치계획

○ 위와 같이 시설물 정비구간에 대하여 2019년 도로부속시설물 일상유지보수공사를 실시하여 안전하고 쾌적한 도로환경 조성 및 제설 홍보효과를 증대시키고자 함.

□ 향후계획

○ 2019.12.03. : 작업지시 및 공사 시행

○ 2019.12.15. : 작업완료 및 결과 보고

붙 임 1. 제5차 작업지시 내역서 1부.

2. 제5차 작업지시 현황사진 1부.

3. 제5차 작업지시 위치도(별첨) 1부.  끝.