문서번호	토목부-22196
결재일자	2019.12.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
윤효진		여용석	12/03 김용제
협조
	주무관		이상근

소각폐기물 추가 물량 반영 검토보고

(신림공영차고지(저류조 포함)건설공사)

2019. 12.

도시기반시설본부

(토 목 부)

소각폐기물 추가 물량 반영 검토보고

(신림공영차고지(저류조 포함) 건설공사)

공사 구간내 매장문화재 표본조사 수행 중 매립된 소각폐기물이 추가로 발생되어 반영코자 검토 보고드림.

Ⅰ		관 련 근 거

○ 서울 신림 공영차고지 조성 공사 예정부지 지표조사에 따른 문화재 보존조치 사항 통보 [역사문화재과-17874호(2019.9.26.)]

○ 가연성(소각)폐기물 추가 수량 실정보고 [신림차고지(감) 제2019-70호]

Ⅱ		사 업 개 요

○ 위    치 : 관악구 신림동 140-2번지 일대

○ 규    모 : 공영주차장 및 빗물저류조 조성

- 주 차 장 : 버스 101대(지상1층, 지하1층), 관리동 및 부속시설

- 저 류 조 : 빗물저류조 1개소(면적 7,000㎡, 체적 35,000㎥)

○ 사업기간 : 2018.10. ~ 2021.09.

○ 총사업비 : 66,390백만원

Ⅲ		추 진 경 위

○ '18.10.01. : 공사 계약 및 착공

○ '19.11.01. : 소각폐기물처리용역 착수

○ '19.09.20. : 문화재 지표조사 수행

○ '19.10.14. : 문화재 표본조사 수행

Ⅳ		감리단 검토의견

○ 공사구간내 문화재 표본조사 수행 및 현장정리 과정에서 가연성(소각)폐기물이 추가 발생되어 물량 및 용역비 증가 변경이 필요함.

○ 소각폐기물(가연성) 추가 발생 현황

소각 폐기물 현황 사진
위치도 및 물량 산출

○ 물량 검토

구 분	단위	수량			비 고
		당 초	변 경	증ㆍ감
소각폐기물 처리비	ton	***	***	***********
소각폐기물 운반비	`㎥	***	***	***********

○ 용역비 검토

(단위 : 천원)

구분		당 초	변 경	증ㆍ감	비 고
소각폐기물
	폐기물 운반비	******	******	**************	*******
	폐기물 처리비	******	******	**************	*******
소 계		******	******	**************
제잡비 및 부가세		*****	*****	**************
총 용역비		******	******	**************

Ⅴ		조 치 의 견

○ 소각폐기물 추가 물량 발생분 반영 요청 건에 대하여 관련 규정 등을 검토한 결과 책임건설사업관리자의 검토의견은 적정하므로 향후 설계변경시 반영하고자 함.

붙임 1. 감리단 검토의견서 1부.

2. 설계 내역서 1부.

3. 관련 공문 1부.  끝.