문서번호	설비부-19478
결재일자	2019.12.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
임원성		이종근	12/03 임정규
협조

「동부간선도로확장(2공구) 전기공사」

설계변경(총차5회, 7차1회)시행 보고

2019. 12.

도시기반시설본부

(설 비 부)

「동부간선도로확장(2공구) 전기공사」

설계변경(총차5회, 7차1회) 시행 보고

동부간선도로확장 2공구 책임건설사업관리단이 제출한 설계변경(총차5회, 7차1회 계약금액 및 공사기간) 요청에 대하여 검토하고 보고 드림

1		공사개요

□  공사명: 동부간선도확장(2공구) 전기공사

○ 규모: 녹천교~상계주공 11단지 간(3.2㎞) 도로확장(4차로→6차로)

- 수전설비: 6,500kVA, 가로등: 169본, 터널등: 1,891등(도봉지하차도 2,980m)

○ 공사비: ***********************************

○ 감리사: ㈜이산

○ 계약자: 태경이엘피㈜

(단위: 원)

구분	계약금액	준공금액	공사기간	비고
**	***************	***********	**********************
***	************	***********	**********************	**
**	************	**********	**********************	**
**	************	**	**********************	****
**	***********	***********	**********************	**
**	************	***	**********************	****
**	***********	**	*********************	****
**	**************	*	*********************	**

2		관련근거

□  관련근거

○ 설비부-6088호(2019.5.7.)

- ‘케이블트레이 및 전기실 관련 실정사항 검토 보고’

○ 설비부-18664호(2019.11.22.)

- ‘설계변경 실정내용 검토 보고’

○ 계약심사과-20633호(2019.11.27.)

- ‘동부간선도로확장(2공구) 전기공사(설계변경) 계약심사 결과 통보’

○ 책임건설사업관리단 이산2019-6112호(2019.12.2.)

- ‘설계변경 도서 및 공사기간 연장 요청 검토 보고(총차5회, 7차1회)’

3		검토내용

□  변경내용

(단위: 원)

구분		당초	변경	증감	비고
** ****	** **	**************	***************	**************	****** *******
	** **	************ ***********	*********** ***********	*****
** ****	** **	*************	*************	************	****** *******
	** **	********** ***********	********** **********	****

□  공사비 변경사유

○ 실정보고 1회(조명용 케이블트레이 지지대 부속자재 규격 변경)및 실정보고 2회(지하차도 조도계산서 변경 적용 외 8건)에 따른 총차 및 7차 변경

※ 설계변경 계약심사(계약심사과) 이행

※ 붙임 1 세부 변경현황 참조

□  공사기간 변경사유

○ 총차

- 선행 토목공사 공사기간 연장(2019.12.31. → 2021.10.31.까지)에  따른 전기공사 연장

○ 7차

- 토목공사(내화재 선정 등) 지연으로 인한 지하차도 내 전기공사 추진 지연

- 건축 및 토목공사 분 전기실(’20년 3월) 및 중앙관제실(’20년 4월) 지연

- 마들로 교차로(지하구조물 완료후 시공) 지연에 따른 신호등설비 공사 지연

4		검토결과

□  건설사업관리단 검토의견

○ 총차(5회) 및 7차(1회)에 대한 설계변경 및 공사기간 연장 검토 결과 설계변경 도서는 계약심사 결과를 적용하여 적정하게 반영되었으며,

○ 토목공사의 총차분 공기연장에 따라 전기공사의 공사기한을 연장이 필요하며 7차분 전기공사 공기연장은 지하차도내 내화재 및 전기실 설치등 선행공종 시공지연에 따라 공사기간을 연장 조치함이 타당함

□  보고자 의견

○ 동부간선도로확장 2공구 책임건설사업관리단이 검토한 설계변경도서 및 공사기간 연장 내용이 적정한 것으로 판단되어 설계변경계약 의뢰하고자 함

붙임: 1. 세부 변경현황(총차 및 7차). 1부.

2. 책임건설사업관리단 검토보고서 1부.

3. 설계변경 내역서 2부.

4. 설계변경 계약심사 결과서 1부.   끝.

「붙임1」

설계변경 세부 현황(총차 5회)

공 종	당 초	금 액	변 경	사 유	금 액	증감(-)
1. 가로등 설비공사
1) 가로등설비	-	-	-	-	-	-
2.도봉지하차도 전기설비공사
1) 수변전설비	-	-	-	-	-	-
2) 전등설비	******************* ********** ****************	*********	******************* ********** *****************	********** *********** ************** *********************** **************	*******	********
3) 동력설비	*	*	*	*	*	*
4) CABLE TRAY설비	************************************** ********* ********************* ********************* ********************* ******************************** ************************** ********************* ************************* ********************** ************ ********************** *********** ********************************	*********	************************************** ********** ********************** ********************** ********************* ***************************** ********* *********************** ********* ********************* ************************ ********************** **************** ********************** ************* ***************************** *******	*********** **************** ***** *********** ******** *********** ************** ***** *********** ************ ****** ************ ************ ******	*********	*******
5) 접지설비	*	*	*	*	*	*
6) 배연댐펌 간선설비	**************** **************** ****************************	******	**************** **************** ******************************	********** *****	******	******
7) 환기덕트 전등설비	**************** **************** ****************************	******	**************** **************** ******************************	********** *****	******	******
8) 전력자동 제어설비	*	*	*	*	*	*
9) 관리소 동력설비	*	*	*	*	*	*
10) 관리소 전등설비	*	*	*	*	*	*
11) 피난계단 동력설비	**************** ************************* ******************* ****************** ******************	*******	**************** *********************** ******************** **************** **********************	********* *********** **********	*******	******
12) 관리소 CABLE TRAY	*	*	*	*	*	*
13) 지하차도 집수정조명설비	*	*	*	*	*	*
14) 피난계단 유도등설비	***************** ******************** ******************* ******************	*	****************** *********************** **************** *******************	********* ********** **********	******	******

공 종	당 초	금 액	변 경	사 유	금 액	증감(-)
3. 도봉지하차도 소방설비공사
1) 방재설비	********* ******************** ******************** ********************** ********************	*******	********* ********************* ********************* *********************** *********************	*********** ****** ********** ********** ************ ***** ******* ***********	*******	******
2) 소화기 표시등설비	*	*	*	*	*
3) 시선유도등 설비	*	*	*	*	*
4) 진입로 차단막설비	*	*	*	*	*
5) 관리소 소방설비	*	*	*	*	*
4. 신호등설비공사
1) 신호등 설비공사	*	*	*	*	*
5. 철거 고자재 감액
1) 고재처리	*	*	*	*	*
2) 보안등,살충 등 철거고재	*	*	*	*	*
3) 가로등 교통신호등 철거고재	*	*	*	*	*
10. 제경비	*********	*********	**********		*********	*
11. 도급액	**********	**********	**********		**********	*******

설계변경 세부 현황(7차 1회)

공 종	당 초	금 액	변 경	사 유	금 액	증감(-)
2.도봉지하차도 전기설비공사
2) CABLE TRAY설비	******************** ******************************* ***************************** ************ ************ ************************	*********	******************** ******************************* ***************************** ************* ************ ************************	*********** ******* ************ ********	*******	*******
11) 피난계단 동력설비	****************	*******	****************	******** ************ ************ ********** *********	*******	*****
10. 제경비	*********	*******	**********		*******	*******
11. 도급액	**********	*********	**********		*********	*******