문서번호	공원여가과-1795
결재일자	2019.12.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	공원여가과장	서부공원녹지사업소장
한소진	류기혁	강현주	12/03 代강현주
협 조

- 노을 가족캠핑장 면 정비공사(조경) -

실정사항 검토보고 및 설계변경 계획

2019. 12.

서부공원녹지사업소

【공원여가과】

- 노을 가족캠핑장 면 정비공사(조경) -

실정사항 검토보고 및 설계변경 계획

우리사업소에서 시행 중인 「노을 가족캠핑장 면 정비공사(조경)」관련 현장여건 반영 및 이용자 편의증대를 위한 변경사항이 있어 실정사항 검토 및 설계변경·정산 계획을 보고 드림.

Ⅰ	공 사 개 요

□ 공 사 명: 노을 가족캠핑장 면 정비공사(조경)

□ 위    치: 노을공원 4, 5, 7번광장

□ 공사기간: ‘19. 11. 5. ~ ’19. 12. 14.

□ 공 사 비: 금51,508,590원(도급 47,413천원, 관급 4,096천원)

□ 도 급 자: ㈜스마일그룹 대표 권민정

□ 공사내용: 사이트간 이격거리 확장, 화덕철거 및 신설 등

Ⅱ	실정사항 및 조치계획

구 분	실정사항	검토결과	비 고
A구역	▸ 화장실입구·개수대 앞 통행로 확보를 인한 위치 조정 및 B구역 규모 축소분 반영 (당초 53개소 → 54개소 / 1면 증) - 안내판 이설(H1.0*W0.3) 32개소 → 54개소 - 안내판 설치(H1.0*W0.3) 22개소 → 0개소 - 화덕 설치(1400*1400) 53개소 → 54개소 - 로프설치(12mm) 1,484m → 1,512m - 고정팩설치(L300) 530개 → 540개	⊳현장여건 변동에 따른 조정물량 반영
B구역	▸ CCTV 사각지대, 입구로부터 원거리 등 안전 및 편의증대를 위한 구역 조정 ·면 확보를 위한 기반정비(잔디식재)필요 (당초 31개소 → 26개소 / △ 5면 ) - 안내판 이설(H1.0*W0.3) 30개소 → 26개소 - 화덕 설치(1400*1400) 31개소 → 26개소 - 로프설치(12mm) 868m → 728m - 고정팩설치(L300) 310개 → 260개 - 잔디식재(60*40) 58.8㎡ → 600㎡	⊳현장여건 변동에 따른 조정물량 반영
C구역	▸ 개수대 입구 통행로 확보를 위한 위치 조정 (당초 19개소 → 21개소 / 2면 증) - 안내판 이설(H1.0*W0.3) 19개소 → 21개소 - 화덕 설치(1400*1400) 19개소 → 21개소 - 로프설치(12mm) 532m → 588m - 고정팩설치(L300) 190개 → 210개	⊳현장여건 변동에 따른 조정물량 반영
부대공	▸ 폐기물 감소에 따른 수량 조정 및 전선 매설지 잔디식재 물량 누락분 반영 - 폐기물 발생 감소 26.09㎥ → 19㎥ - 잔디보수(전선인입구간 W400) 300m → 700m	⊳현장여건 변동에 따른 조정물량 반영
제경비	▸ 건강보험료, 연금보험료 등 미사용 ▸ 산업안전보건관리비, 환경보전비 등 미사용	⊳ 미사용분 정산 반영
	※ 면 조정 변동사항 - 현재 총138면(당초계획 136면 → 변경계획 134면 / 현재대비 △4면)

※ 세부 변경내역 따로붙임

Ⅲ	변 경 금 액

구 분		공 사 비(원)		증 감	비 고
		당 초	변 경
총 공 사 비		51,508,590	60,085,590	증 8,577,000
도급비	공급가액	43,102,727	50,900,000	증 7,797,273
	부 가 세	4,310,273	5,090,000	증 779,727
	계	47,413,000	55,990,000	증 8,577,000
관 급 자 재		4,095,590	4,095,590	-

□ 예산조치: 증액되는 사업비는 낙찰차액을 활용하여 반영하고자 함

예산액(재배정액)	발주금액	집행 및 계약금액	낙찰차액 및 집행잔액
96,103,000	96,102,590	87,508,590	8,594,410

□ 예산과목: 서부공원녹지사업소 공원여가과, 공원 녹지정책 개발 및                  만족도 개선, 공원 유지관리 및 이용활성화, 시 공원 유지관리                  및 보수 정비, 시설비및부대비, 시설비(도시계발특별회계)

Ⅳ	보고자 의견

□ 상기 실정사항에 따라 검토내용 반영 및 설계변경을 시행하여 공사        시행에 만전을 기하고자 함.

붙임  1. 변경내역서 1부.

2. 계약금액조정 검증확인서 1부.  끝.