설계변경 심의 의견서

부분공개(5)

1. 계약명: 2019년도 아리수올림터 모터펌프 수리 연간단가

신청 부서명	강동수도사업소 시설관리과
업무 담당	지방공업주사 오해동
제출 년월일	2019. 12. 3.

2. 심의 위원회 의견

- 심의일시: ****************************

- 심의의견: 설계변경에 따른 심의 결과에 대하여 아래와 같이 의견을 제시함.

위   원

직  위

성  명

서  명

의  견

위 원 장

시설관리과장

편병률

12/03

편병률

타당함

위    원

급수운영팀장

임인택

임인택

타당함

위    원

급수관리팀장

양재덕

代양봉우

타당함

위    원

시설운영팀장

송종학

송종학

타당함

위    원

시설안전팀장

김주경

김주경

타당함

위    원

기전팀장

함태광

함태광

타당함

담    당

주무관

오해동

오해동

-

설계변경 설명서

□ 사업개요

❍ 건    명: 2019년도 아리수올림터 모터펌프 수리 연간단가

❍ 계약기간: 2019. 4. 15. ~ 2020. 3. 31.

❍ 계약금액: 금45,863,010원

❍ 계 약 자: ㈜에이치피아이  대표 최재민

□ 설계변경 사항

❍ 설계변경 사유: 보험료 등 정산

❍ 설계변경 내용

- 계약금액: 변동있음

구분	계약금액(원)		증.감
	당 초	변 경
2019년도 아리수올림터 모터펌프 수리(연간단가)	45,863,010	45,023,000	감840,010

-  세부내용

구분	당초	변경
연금보험료	294,123원	감294,123원
건강보험료	211,115원	감211,115원
노인장기요양보험료	17,966원	감17,966원
환경보전비	102,737원	감102,737원

- 계약기간: 변동 없음

□ 주요 변경 사항

지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제1장 제10절(보험료 정산) 및 건설기술진흥법 시행규칙 제61조제2항(환경보전비 산출등)에

따라 사업완료 전 정산 자료 미제출에 따른 계약금액 감액

□ 심의결과

❍ 설계변경: 타당

❍ 제경비 등 설계내역서 적정여부: 적정

□ 설계변경 의견

❍ 상기 의견에 대하여 심의사항을 승인한다.

붙임  설계변경 내역서 및 심의자료 각  1부.  끝.