“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	지붕재 선정지연 및 협조요청(한양도성 유적전시관)

1. 남산감리19-35(2019.10.18.)호 및 제19-14호 감리검토의견서와 관련입니다.

2. 한양도성 유적전시관 공사중 보호각 지붕재료(폴리카보네이트)의 이중 설치공법에 대하여 하자발생 우려가 있다는 검토 의견서와 지붕재료의 제품별 특성을 비교·검토한 의견서에 대하여 우리시에서는 관계전문가의 자문을 받아 결정하고자 하였으나

2019.9.7. 발생한 태풍 “링링”에 의해 전라남도 광양시 포스코 어울림체육관 외벽에 설치한 폴리카보네이트 마감재가 탈락한 사례가 있고 남산자락의 지형적 특성과 외벽이 없는 대형구조물임을 감안하여 지붕재료에 대한 안전성을 우선 확인할 필요가 있다고 판단되므로 관련 시험과 절차를 거쳐 우수한 제품을 공정하게 선정하고자 합니다.

3. 따라서, 자재선정은 위 절차를 거쳐야 하므로 지연(2020.1월중)됨을 우선 알려드리오니 공정관리에 참고하시기 바라며, 관련시험이 원활하게 진행될 수 있도록 아래사항을 협조해 주시기 바랍니다.

가. 내풍압성 시험용 시험체와 성능시험을 위한 재료 접수·확인 및 현장내 보관 철저

나. 내풍압성 시험체 제작에 필요한 하지부재(100mm×100mm×두께4.5mm) 길이 6m, 4개준비

다. 시험접수 및 시험의뢰 시 시험체 및 재료운반 협조(시험비용은 제품업체별 부담)

라. 동일한 조건에서 시험이 될 수 있도록 시험체 제작기준(도면) 마련 및 도면제공

(연결철물 간격 및 위치 등)

마. 내풍압성 시험체가 제공한 도면과 적합한지 확인 및 시험과정 입회(필요시 녹화)

사. 시험절차 및 방법에 대한 참석자 회의안내

- 장  소: 현장내 사무실

- 일  시: 2019.12.6.(금) 14:30 ~

- 참석자: 폴리카보네이트 제품의 각 업체 관계자, 감리자, 시공자, 서울시 관계자

- 회의내용: 시험절차, 시험체 준비방법, 기타 질의사항 등 설명.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	남산 회현자락 한양도성 유적전시관 감리자(감리원 이메일 송부),남산 회현자락 한양도성 유적전시관 시공자(현장관리인 이메일 송부)
주무관	왕승찬		도성관리팀장	정일선		한양도성도감과장	12/03 안중호
협조자
시행	한양도성도감-12453	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 서울시청 서소문 청사 1동 5층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-2671	/전송	02-2133-1063	/	vivawang@seoul.go.kr	/	부분공개(6)