문서번호	기전과-12021
결재일자	2019.12.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
이성도		12/03 서승완
협조

『교통안전시설 원인자부담공사(서울시 C-ITS 실증사업)』

현장 실정보고에 대한 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 12.

강서도로사업소

(기전과)

『교통안전시설 원인자부담공사(서울시 C-ITS 실증사업)』

현장 실정보고에 대한 검토보고

우리사업소에서 승인한 교통안전시설(신호) 원인자부담공사와 관련    감리사로부터 현장 실정보고서가 제출되었기에 검토보고 드림.

Ⅰ		관 련 근 거

교통정보과-7699(2019.12.03.)호

C-ITS감2019-1107-02(2019.11.07.)호

Ⅱ		공 사 개 요

공 사 명 : 서울시 C-ITS 실증사업 중 신호공사

원 인 자 : 서울특별시 교통정보과

공사기간 : 2018.06.19. ~ 2021. 07. 31.

공사장소 : 영등포구 여의도 마포대교남단교차로 외 16개 교차로

공사개요 : 교통신호제어기 교체 17대(부분품 설치 3대 포함)

관련업체 및 주요설치 내용

구 분	설 계	감 리	시공업체	승인주요내용
신호기	㈜동림티엔에스	㈜문엔지니어링	㈜성남신호	신호제어기 교체 14대 신호제어기 부분품 설치 3대

Ⅲ		감리사 실정보고 내용

보고내용

- 현장여건 변동에 따른 물량 변경

물량변경내용

구 분	변경 전	변경 후	변경사유
교차로	17개 교차로	22개 교차로	여의도 신호개방 확대
제어기 교체	14대	18대
신호정보연계모듈 설치	17개	22개

※ 변경 상세내역 : 붙임의 실정보고서 참조

Ⅳ		검 토 결 과

감리사 실정보고에 대하여 승인하고자 함

Ⅴ		행 정 사 항

원인자, 감리사 및 유관기관 승인 통보

붙임 1. 원인자공문 및 감리사 기술검토의견서 1부.

2. 설계변경내역서 및 설계도면(확대 5개 교차로) 1부.  끝.