투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(준공기한 연기 조치 알림)

1.업무지시현장 : 동부간선도로확장 3공구(방음벽구간 등) 통신공사(장기계속-1차) 동부

엔지니어링 주식회사, 동부간선도로확장 3공구(방음벽구간 등) 통신공

사(장기계속-1차) 제일정보통신주식회사

2.작 성 일 자 : 2019-12-03 15:12:54

3.지 시 내 용

가. 공기연장 검토보고(동부엔지니어링 2019-3004호, 2019.11.28.)와 관련입니다.

나.「동부간선도로 확장(3공구) 통신공사」 준공기한 연기 요청에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기조치하였으니 통신공사 공정관리 및 안전관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

〇 준공기한 연기

구 분	당 초	변 경	비 고
총 차	`17.04.26.~`19.12.31.	`17.04.26.~`20.05.31.	152일 연장
3 차	`17.07.22.~`19.12.31.	`17.07.22.~`20.05.31.	152일 연장

주무관							김수진			시책사업과장					12/03 이종근
협조자
시행			설비부-19557									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층															/			http://infra.seoul.go.kr/
전화		02-3708-8646						/전송			02-3708-8659					/	tnwls0169@seoul.go.kr												/	대시민공개