투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	감리용역 설계변경 계약 의뢰(총차 1회, 1차 1회) (개봉고가 성능개선공사 외 1개소 감독권한대행 등 건설사업관리용역)

우리 부에서 시행 중인 “개봉고가 성능개선공사 외 1개소 감독권한대행 등 건설사업관리용역”에 대해 아래와 같이 변경계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 용 역 명 : 개봉고가 성능개선공사 외 1개소 감독권한대행 등 건설사업관리용역

2. 용 역 비 : 2,574,322천원 (1차 : 264,970천원)

3. 용역기간 : '19. 6. 17. ∼ '23. 7. 16. (1차 : '19. 7. 16. ∼ '19. 12. 28.)

4. 용 역 사 : ㈜유신 외 2개사

5. 예산과목 : 교량관리, 고가차도 및 입체교차로 관리, 개봉철도고가 바닥판교체 정비공사, 감리비

6. 변경현황 : 전체 1회 및 1차 1회

(단위 : 원)

*******		*************			****
		*****	*****	*****
** ****	***	*************	*************	***************
	****	********** ***********	********** ***********	****
** *******	***	***********	***********	*************
	****	********** ************	********** **********	********

- 변경사유

․ 감리원 운영조직 개편 및 부족인원 조기투입

․  안전사고 재발방지대책의 일환으로 감리원 출퇴근 7‧4제 시행에 따라 분야별 건설사업기술인 추가투입방안 보고(토목부-21289호, 2019.11.21.)

붙임 1. 방침서 1부.

2. 설계변경 내역서(전체 1회) 1부.

3. 설계변경 내역서(1차 1회) 1부.

4. 합의각서 1부.(별도송부)  끝.

	토목부장
주무관	김동수		터널건설과장	여용석		토목부장	12/03 김용제
협조자	주무관	김구		도시고속도로과장	代이상욱A
시행	토목부-22269	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동) 프리미어플레이스빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2567	/전송	02-3708-2599	/		/	부분공개(5)