투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	변경계약 의뢰[동부간선도로 확장 3공구 통신공사(총차, 3차)]

우리 본부에서 시행 중인「동부간선도로 확장 3공구 통신공사」에 대해 아래와 같이 변경 계약을 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 동부간선도로 확장 3공구(방음벽구간 등) 통신공사

나. 공사금액 : 금1,237,580,000원(3차: 585,570,000원)

다. 공사기간 : `17.04.26. ~ `19.12.31.(3차: `19.07.22. ~ `20.05.31.)

라. 시 공 사 : 제일정보통신(주) 대표자 허영근

마. 변경계약 의뢰 현황

구 분		당 초	변 경	증 · 감
총차	계약금액	금1,237,580,000원	금1,237,580,000원	-
	계약기간	`17.04.26. ~ `19.12.31.	`17.04.26. ~ `20.05.31.	증) 152일
3차	계약금액	금585,570,000원	금585,570,000원	-
	계약기간	`19.07.22. ~ `19.12.31.	`19.07.22. ~ `20.05.31.	증) 152일

바. 변경사유 : 선행공사 지연에 따른 공사기간 연장

사. 지체상금 부과여부 : 미부과

아. 예산과목 : 도로건설, 광역도로건설, 동부간선도로 확장(녹천교~의정부시계), 시설비

붙 임  1. 검토 보고서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.

	설비부장
주무관	김수진		시책사업과장	이종근		설비부장	12/03 임정규
협조자
시행	설비부-19540	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8646	/전송	02-3708-8659	/	tnwls0169@seoul.go.kr	/	부분공개(5)