＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	남부수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	설계변경 계약의뢰「노량진아리수올림터 송수펌프 성능개선」

1. 우리 사업소에서 추진중인 「노량진아리수올림터 송수펌프 성능개선」을 관련 아래와 같이 설계변경 계약의뢰합니다.

가. 계 약 명 : 노량진아리수올림터 송수펌프 성능개선

나. 계 약 자 : *****************

다. 계약기간 : *************************

라. 변경사유 : 공종별 물량변동

마. 설계변경 개요

(단위 : 원)

구 분	당초 금액	변경 금액	증 · 감
㈜신한알앤디	94,100,000	56,652,000	감37,448,000

바. 예산과목 : 상수도사업비, 영업비용, 배급수비, 아리수올림터 배수지등 기전설비 유지관리,                  수선유지교체비, 수선유지비

붙임 :  1. 설계변경내역서 1부.

2. 설계변경 사전심의 의결서 1부.

3. 합의서 1부.

4. 설계변경 검토 보고 1부.

5. 설계변경 시행 1부.  끝.

	시설관리과장
주무관	임영택		기전팀장	윤덕묵		시설관리과장	12/03 고신석
협조자
시행	시설관리과-25257	(		)	접수		(		)
우	07062	동작구 여의대방로 10길 97 남부수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-4521	/전송	02-3146-4479	/		/	부분공개(5)