문서번호	설비부-19536
결재일자	2019.12.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시책사업과장	설비부장
김수진	이종근	12/03 임정규

『동부간선도로 확장(3공구) 통신공사』

물가변동에 따른 계약금액 조정 검토 보고

2019. 12.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『동부간선도로 확장(3공구) 통신공사』

물가변동에 따른 계약금액 조정 검토 보고

『동부간선도로 확장(3공구) 통신공사』의 물가변동(ESC)에 따른 계약금액 조정(제2회)에 대하여 검토하고 보고 드림

1		공사현황

공사개요

❍ 사 업 명: 동부간선도로 확장(3공구) 통신공사

❍ 공사위치: 상계주공16단지 ~ 의정부시계

❍ 공사규모: 도로확장 4→6차로, 연장 2.25km(방음터널 1.37km 포함)

❍ 주요설비: CCTV, 영상검지기, 도로전광표지판 이설 등

❍ 공사기간: 2017.04.26. ~ 2019.12.31.

❍ 도 급 비: 1,237백만원

❍ 감 리 단: 동부엔지니어링주식회사

❍ 시 공 사: ㈜제일정보통신

2		검토내용

관련근거

❍ 물가변동으로 인한 계약금액 조정요건 발생보고(동삼감 제2019-162호)

❍ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제22조

❍ 공사계약 일반조건 제22조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정)

계약금액 조정 조건

❍ 계약체결일(직전조정일)로부터 90일 경과

❍ 입찰일(직전조정일)로부터 물가변동 조정률이 3% 이상 발생시

물가변동 현황(총괄)

구분	기간요건		등락요건		물가변동금액	비고
	기준시점	비교시점	기준시점	비교시점
1회	2017.04.24(계약체결일)	2018.01.01 (251일)	2017.04.11(입찰일)	2018.01.01 (5.36%)	49,049,000원	품목조정
2회	2018.01.01 (직전조정일)	2018.09.01 (242일)	2018.01.01 (직전조정일)	2018.09.01 (4.58%)	19,814,000원	품목조정
계					68,863,000원

조정금액 산출내용

❍ 제2회 물가변동

품목조정률 [K]		4.58%	물가변동 경과기간	242일	기준시점(직전조정일) : 2018.01.01.
					비교시점(조정기준일) : 2018.09.01.
도급계약금액 ①			1,118,620,050원		선금공제금액 ③	0원
적용제외금액 ②			685,984,000원		조정대상금액 ④ [④=①-②]	432,636,050원
기준	예정공정률		22.22%		물가변동금액 ⑤ [⑤=④×K-③]	19,814,000원
	실행공정률		24.29%
	실기성률		58.28%		조정적용금액 ⑥ [⑥=①+⑤]	1,138,434,050원
	적용공정률		61.32%

책임건설사업관리기술자 검토의견

❍ 상기와 같이 물가변동으로 인한 계약금액 조정보고서(2회)를 검토한 결과 관련법규에 의거 계약 체결 후 90일 이상 경과되고, 품목조정률이 100분의 3 이상 증가하였으므로 물가변동으로 인한 계약금액을 조정함이 타당하다고 판단됨.

검토결과 조치의견

❍ 건설사업관리기술자가 제출한 동부간선도로 확장(3공구) 통신공사의 물가변동으로 인한 계약금액(ESC) 조정(제2회)에 대해 검토한 결과 적정한 것으로 판단되어 승인 통보하고자 하며 향후 설계변경시 반영하고자 함.

붙 임 : 건설사업관리기술단 공문 1부.  끝.