문서번호	서울숲공원지원과-2477
결재일자	2019.12.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	서울숲관리팀장	서울숲공원지원과장	동부공원녹지사업소장
이정호	강명환	송복식	12/03 최현실
협 조
	공원운영과장		배기선
	재무팀장		곽선아

<서울숲 수변(중앙)호수 수질개선사업> 관련

추가 폐기물 처리 용역 추진계획

2019. 12.

동부공원녹지사업소

(서울숲공원지원과)

<서울숲 수변(중앙)호수 수질개선사업> 관련

추가 폐기물 처리 용역 추진계획

서울숲공원지원과에서 추진 중인「서울숲 수변(중앙)호수 수질개선사업 폐기물 처리 용역」과 관련하여 당초 계약물량 외 추가 물량이 발생하여 처리계획을 아래와 같이 검토보고 드림

□ 용역개요〈당초〉

❍ 용 역 명 : 서울숲 수변(중앙)호수 수질개선사업 폐기물 처리 용역

❍ 위    치 : 서울시 성동구 서울숲2길 8-15

❍ 용역기간 : 2019. 8. 05. ~ 2019. 11. 29.(27일 연장포함)

❍ 계약금액 : ************

※ 발주금액 : ************

❍ 계약업체 : ***********[(주)한강이엠피]

❍ 용역내용 : 폐기물 운반 및 처리 (건설오니 360ton)

□ 문제점 및 처리계획

❍ 폐기물 현황 및 문제점

- 당초 폐기물처리 계약물량은 총 360ton이었으나, 실제 연못 준설 결과  약 600ton 추가 물량이 발생함

- 추가 물량에 대하여 폐기물 처리업체에 설계변경(물량증가)을 통하여 처리코자 요청하였으나, 폐기물 보관시설 및 생산된 제품(순환진흙)의 보관장소 부족으로 인하여 현장 내 추가로 생산되는 폐기물의 처리가 불가능함을 회신받음(붙임 공문 참조)

❍ 처리계획

- ’19년 회계연도 마감 대비 및 동절기 수변(중앙)호수 주변 폐기물의 신속한 처리를 위하여 본 공사 낙찰차액을 활용, 폐기물 전문 처리업체와 별도 수의계약을 시행하여 즉시 추가 폐기물을 반출하고자 함

□ 추가 폐기물 용역 처리계획

❍ 용 역 명 : 서울숲 수변(중앙)호수 수질개선사업 추가 폐기물 처리 용역

❍ 위    치 : 서울시 성동구 서울숲2길 8-15

❍ 용역기간 : 2019. 12. 2 ~12. 20

❍ 발주금액 : ********************

❍ 계약업체 : **********

❍ 계약방법 : 수의계약

▸ 관련근거

1. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제30조 제1항 제2호

2. 수의계약 운영 개선계획(서울특별시장방침 제375호, 2015. 12. 13)

▸ 수의계약사유 : 회계연도 마감 대비 및 동절기 조속한 폐기물 처리를 위하여 폐기물 처리경험이 많은 전문업체와 수의 계약

❍ 용역내용 : 폐기물 운반 및 처리 (건설오니 약 600ton)

□ 사업비 예산검토

(단위:원)

총예산 (A)	구분	설계 용역비	공사비		집행잔액 (A-B)	집행 +낙찰 (A-B-C)
			도급비	폐기물 처리비
350,000,000	발주금액 (B)	15,000,000	276,134,000	26,200,000	32,666,000	46,813,400
	계약금액	14,250,000	265,700,000	23,236,600
	낙찰차액 (C)	750,000	10,434,000	2,963,400

※ [집행+낙찰]차액 46,813천원 활용

❍ 예산과목 : 동부공원녹지사업소 공원운영과, 공원녹지관리수준향상 및 도시녹화 지원, 공원관리 및 도시녹화 지원, 응봉공원     시설물 정비, 시설비및부대비, 시설비

□ 보고자 의견

❍ 상기와 같이 기존 폐기물 처리용역은 계약내용대로 준공처리하고, 추가 폐기물 물량에 대하여는 별도 계약을 추진하여 공사 추진에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 시공사 회신공문 및 현황사진·설계서 각 1부.  끝.