투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신	내부결재
(경유)
제목	난지수계 차집관로 준설공사 설계변경(2회) 시행

우리센터에서 시행중인“2019년 난지수계 차집관로준설공사(연간단가)”에 대하여 아래와 같이 설계변경(2회) 시행코자 합니다.

1. 공 사 명 : 2019년 난지수계 차집관로 준설공사(연간단가)

2. 공사기간 : 2019. 5. 27 ~ 2019. 12. 31

3. 도 급 자 : 경원산업건설 대표 김억식

4. 변경사유 : 붙임 설계변경사유서 참조

5. 예산과목 : 사업비용, 영업비용, 처리장비, 수선유지교체비,

수선유지비

6. 공 사 비

구 분	당초금액	변경금액	증‧감	비 고
총공사비	420,821,100	600,000,000	179,178,900
도급비	420,821,100	600,000,000	179,178,900

붙임 1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설게변경 내역서 1부. 끝.

주무관	최기문		시설팀장	이호복		시설보수과장	조선행		난지물재생센터소장	12/04 이철범
협조자
시행	시설보수과-3294	(		)	접수		(		)
우	10542	경기도 고양시 덕양구 대덕로 426 (현천동) 본관 2층 시설보수과	/
전화	02 300 8590	/전송	02 300 8587	/	cgm84@seoul.go.kr	/	대시민공개