＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	남부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행[2019년 아리수 직결음수대 설치공사(신관중학교외 24개소)]

우리사업소에서 시행중인『2019년 아리수 직결음수대 설치공사(신관중학교외 24개소』에 대하여 설계변경 심의위원회 심의를 완료하고 아래와 같이 설계변경을 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2019년 아리수 직결음수대 설치공사(신관중학교외 24개소)

나. 공사개요 : 당초 D=15~40mm, L=795m

변경 D=15~50mm, L=1,063m

다. 공사기간 : 2019.8.2. ~ 2019.12.7.

라. 계 약 자 : ㈜시스템하나 (대표 : 임양석)

마. 설계변경 내역

구 분	당 초	변 경	증ㆍ감	비고
도 급 비	49,448,900	71,945,000	증) 22,496,100
공급가액	44,953,546	65,404,546	증) 20,451,000
부 가 세	4,495,354	6,540,454	증) 2,045,100

바. 설계변경 사유 : 공종별 계약물량 증․감에 따른 변경

사. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비(지원사업성시설비), 음수대설치

붙임 : 1. 설계변경 검토보고 1부.

2. 설계변경 사전심의의결서 1부.

3. 설계변경 내역서 1부.

4. 검증확인서 1부.

5. 설계변경 합의서 1부.

6. 보험료 완납증명원 1부.  끝.

주무관	신성현		급수관리팀장	이일로		급수운영과장	이성환		남부수도사업소장	12/04 박영준
협조자	주무관	박준기		주무관	박창남		주무관	박현주
행정지원과장	김지형
시행	급수운영과-22814	(		)	접수		(		)
우	07062	동작구 여의대방로 10길 97 남부수도사업소 급수운영과	/
전화	02)3146-4572	/전송	02)3146-4589	/		/	부분공개(5)