＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	서부수도사업소
수신	(주)수인엔지니어링 대표 이호성 귀하
(경유)
제목	실정보고서 관련 회신(옹벽)

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 비탈면(팔각정 하부) 보수공사와 관련 실정보고한 수인제2019-1203-5(2019.12.03.) 호에 대한 검토결과를 아래와 같이 회신하오니 공정관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 2019.12.02.(월) 현장회의시 검토된 옹벽부 변경안 변경도면대로 시공하여 주시기바라며,

나. 변경시공에 따른 물량변경에 대해 추후 설계변경 시행.

붙임  수정옹벽 평면도1204 1부.  끝.

	서부수도사업소장
★주무관	방만천		행정관리팀장	엄태현		행정지원과장	12/04 代엄태현
협조자
시행	행정지원과-26294	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)	/
전화	02)3146-3519	/전송	02)3146-3578	/	pico1@seoul.go.kr	/	부분공개(7)